문서번호	교통행정과-43946
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
정재용		심재호		정창열		05/24
						신용철
협조	계약팀장		황미란
	토목과장		代성규상
	도로관리팀장		허율
	주무관		나은욱		재무과장		김영규

2023년 바닥형 보행신호등 보조장치 설치 계획

2023년 바닥형 보행신호등 보조장치 설치 계획

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [√] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
		데이터기반행정 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2023년 바닥형 보행신호등 보조장치 설치 계획

보행량이 많은 횡단보도, 보호구역 및 통학로 사고 위험 횡단보도에 바닥형 보행신호등 보조장치를 설치하여 횡단보도 주변 보행자 사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 성동형 스마트 횡단보도 추진 계획(2019~2021)

□ 스마트횡단보도(바닥신호등) 설치 계획 승인(성동경찰서)

○ 바닥신호등 계획 지점에 교통안전을 위한 투광등 설치 협조 요청

→ 구비 활용 투광등 설치 추진

□ 예산배정

○ 2023년 보호구역 사업비 재배정(시 보행자전거과, 2023.2.22.)

○ 2023년 보행신호등 보조장치 예산 재배정(시 교통운영과, 2023.4.4.)

□ 관련규정

○ 경찰청 교통관련 지침(바닥형 보행신호등 보조장치 표준지침)

○ 2023년 보행신호 보조장치 사업추진 계획(시 도시교통실)

-  설계 용역 시행 도면 규격화, 감리용역 시행 시공품질 향상

Ⅱ		사 업 개 요

□ 기    간: 2023. 1. ∼ 2023. 10.

□ 규    모: 4개 횡단보도(예정) 및 투광등

□ 소요예산: 439백만원(시비, 구비) ※설계 및 감리비 포함

□ 시설현황

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	합계
스마트횡단보도	14	31	33	-	78개
바닥형보행신호등	10	15	17	14	56개

Ⅲ		추 진 계 획

○ 2022년: 스마트횡단보도 지점에 바닥형 보행신호등 기능 추가(14면)

○ 2023년: 스마트횡단보도 미설치 지점에 바닥형 보행신호등 신규 설치(12면)

구 분	개소	횡단보도(면)	예산(백만원)	비고
2022년	14	14	260 (시 160, 구 100)	- 단일로에 바닥형 보행신호등 보강 설치
2023년	4	12	439 (시 374, 구 65)	- 교차로에 바닥형 보행신호등 신규 설치

Ⅳ		세 부 예 산

□ 소요예산: 439백만 원(시 374, 구 65)

□ 예산과목

○ 서울시 교통운영과: 285백만 원(시비 재배정)

- 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선. 교통안전 시설물 관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 감리비

○ 서울시 보행자전거과: 89백만 원(시비 재배정)

- 도시교통실 보행자정거과, 보행환경 개선 및 자전거이용 활성화, 교통약자 이동편의 증진, 어린이 안전 영상정보 인프라 구축, 시설비 및 감리비

○ 교통행정과 : 65백만 원(구비, 어린이보호구역)

- 교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설 개선사업, 어린이(노인)보호구역 개선, 시설비

Ⅴ		추 진 일 정

□ ’23. 1. ~ 4. 예산 확보, 관계기관 협의(성동경찰서, 도로사업소)

□ ’23. 5. ~ 6. 설계 용역 시행

□ ’23. 7. ~ 10. 바닥신호등 공사감독 및 감리용역 의뢰

○ 보도 턱낮춤, 바닥신호등, 투광등 공사 시행 협조 --------------- 토목과

붙임  설치 예정지 목록 및 위치도 1부.  끝.