문서번호	자연생태과-10047
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	자연생태기획팀장	자연생태과장	푸른도시여가국장
윤정환	신현호	한정훈	전결 05/24
			代김인숙

바람길숲 조성(2차) 설계용역 추진계획

바람길숲 조성(2차) 설계용역 추진계획

2023.  5.

푸른도시여가국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

바람길숲 조성(2차) 설계용역 추진계획

외곽 산림에서 생성되는 차고 신선한 공기를 도심으로 유도·확산하여 도심 내 미세먼지 저감하고 열섬현상을 완화하기 위해 바람길숲 조성(2차) 기본 및 실시설계 용역을 시행코자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 추진경위

ㅇ '19. ~ '21.  : 바람길숲 1차 조성사업 완료

ㅇ '22. 4.      : 2023년 바람길숲 예산요구 관련 알림 (산림청)

ㅇ '22. 6.      : 바람길숲 조성사업(2차) 대상지 조사 (11개 자치구 37개소)

ㅇ '22. 12. 15. : 바람길숲 조성사업(2차) 추진계획 수립

ㅇ '22. 12. 28. : 국고보조금 확정 [총 사업비 100억(국비50억, 시비50억)]

ㅇ '23. 05. 10. : 2023년 제3차(5월) 투자심사 완료 (조건부추진)

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 바람길숲 조성(2차)

ㅇ 대 상 지 : 종로구 등 11개 자치구 총 37개소 (※ 설계과정에서 변동가능)

ㅇ 추진내용

- 바람생성숲, 연결숲, 디딤숲 등 다양한 형태의 숲을 통해 도심과 도시 외곽 녹지 연결

- 도심 내 맑은 공기 유입･형성으로 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화

ㅇ 추진기간 : ’23. 1. ~ ’25. 12.(3년)

ㅇ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000백만원, 시비 5,000백만원)

- 설계용역비 500백만원(’23년) / 공사비 9,500백만원(’24년 ~ ’25년)

(단위 : 백만원)

사업명	사업비
	계	'23년	'24년	'25년
바람길숲 조성사업(2차)	10,000	500	4,500	5,000
		설계용역	공사시행

Ⅱ		용역추진 계획

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 바람길숲 조성(2차) 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 대 상 지 : 종로구 등 11개 자치구 총 37개소 (※ 설계과정에서 변동가능)

ㅇ 용역기간 : 계약일로부터 7개월

ㅇ 용 역 비 : ******

ㅇ 과업내용

**************************************

********************************************

************************************************

***************************************

**************************************

*************************************************

****************************************

***********************************

ㅇ 예산과목 : 푸른도시여가국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물보호, 생태계 보전사업, 도시숲(바람길숲) 조성, 시설비

□ 용역발주 계획

ㅇ 계약방법 : 공동계약

ㅇ 입찰방법 : 사업수행능력평가(P.Q)

- 참여자의 능력, 사업의 수행실적, 신용도 등 사업수행능력 평가기준에 따라 평가하여 입찰에 참가할 자를 선정

(근거 : 건설기술 진흥법 제35조, 동법 시행령 제52조, 동법 시행규칙 28조)

ㅇ 참가자격

- ****************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

******************************************************

□ 용역업체 선정

ㅇ 선정절차 : 사업수행능력평가(P.Q) 및 가격입찰 후 낙찰자 선정

기술용역타당성심사 및 용역발주심의 (기술심사담당관)	⇨	입찰공고 및 참가신청 (사업수행능력평가서, 첨부서류 제출)	⇨	사업수행실적 평가 및 평가결과 통보 (평가위원 구성)

⇨	입찰집행 (가격제안서 제출)	⇨	낙찰자 선정 (가격점수 + 평가점수)	⇨	계약체결 및 용역시행

ㅇ 입찰참가적격자 선정

- 사업수행능력 평가점수가 90점 이상을 얻은 자를 입찰참가적격자로 선정

(근거 : 서울특별시 건설엔지니어링사업자 사업수행능력 세부평가기준, 서울특별시 공고 제2023-1053호)

ㅇ 낙찰자 결정

- 예정가격 이하로 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정

(근거 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 행정안전부 예규 제232호)

※ 추정가격 5억원 미만인 사업수행능력평가(P.Q) 대상 기술용역의 평가기준

종합평점	해당용역 수행능력	지역업체 참여도	경영상태	입찰가격	비 고
100점	35점	3점	2점	60점

Ⅲ		향후계획

ㅇ 2023. 5. : 기술용역타당성심사, 용역발주심의(기술심사담당관)

ㅇ 2023. 6. ~  7. : 입찰공고, 사업수행능력평가 및 낙찰자 선정

ㅇ 2023. 7. ~ 12. : 계약체결, 용역착수 및 완료

붙임  1. 설계내역서(안) 1부.

2. 과업내용서(안) 1부.  끝.