문서번호	시설관리과-12230
결재일자	2023. 5. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임상근		이유찬	05/25
			이동욱
협조

노후관 정비계획 보고

(종로구 명륜4가)

2022. 5. 25.(목)

중부수도사업소

(시설관리과)

노후관 정비계획 보고 (종로구 명륜4가)

시설관리과장: 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장: 이유찬☎2191 담당: 임상근☎2195

종로구 관내 노후관 정비대상('84~85년 부설 상수도관) 구간을 현장조사하고 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

ㅇ 노후관 현황: DCIP(D80mm, 1985), L= 160m

ㅇ 정비구간: *******************************

****************************

※ 보도(콘크리트가공블럭): 160m, 차도(A-2, 분기부): 4m

- 위치도(GIS)

□ 보고내용

ㅇ 해당 구간은 1985년 부설한 장기사용 배급수관 정비 대상('84~'85년)으로 상수도관 노후 정도가 심하여 관개량이 시급한 실정임.

ㅇ 또한 유동인구가 많은 혜화역 주변 음식점 등 상가 밀집 지역으로 관노후로 인한 누수 발생 시 인근 영업점 피해 우려가 있어, 사전 정비하여 적수  발생 민원을 예방코자 함.

ㅇ 공사 구간 보도 폭이 1m 이내로 매우 협소하여 신설관 부설에 어려움이 있을 것으로 보이는 실정으로 사전에 충분히 확인굴착하여 공사 가능  여부를 판단할 계획임.

ㅇ 공사 구간이 주택가 및 영업점 혼합 지역으로 가급적 주간 공사를 시행할 계획이며 영업 방해 관련 민원 발생 우려가 있으므로 사전 충분한 협의 후 진행 예정임.

ㅇ 합동조사 시행

- 조사자: 지역담당자, 수계조절요원, 연간단가 업체

- 신설관 부설 공간 확인 (타지장물 매설 위치 등)

- 제수밸브 작동여부 확인 등

□ 조치의견

ㅇ 보고내용과 같이 노후 상수도관 정비를 위하여 아래와 같이 시행코자 하며,

- 공사위치: *******************************

********************

- 공사개요: 상수도관 부설(D= 80mm, L= 160m)

- 공사일시: 2022. 5. 29.(월) ~ 6. 2.(금), 09:00 ~ 18:00

ㅇ 공사는「2023년 창신1동 등 10개동 상수도공사(장기계속)」계약업체에 작업지시하여 관 노후로 인한 적수 민원 및 누수 발생을 사전에 방지하고 민원 사항을 신속히 처리코자함.  끝.