문서번호	시설보수과-4450
결재일자	2023. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	05/25
			이경우
협 조

『2022년 오류철도 고가차도 보수공사』

“현장 실정보고(제2회)에 따른 검토결과 보고”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

강서도로사업소

(시설보수과)

『2022년 오류철도 고가차도 보수공사』

“현장 실정보고(제2회)에 따른 검토결과 보고”

2022년 본예산 사업으로 추진 중인『2022년 오류철도 고가차도 보수공사』와 관련 감독위탁 기관으로부터 제출된 "현장 실정보고(제2회)" 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 2022년 오류철도 고가차도 보수공사

□ 공사기간 : 2022. 8. 05 ~ 2022. 12. 31

□ 사 업 비 : 1,900백만원 (도급비 : 1,669,523,810원)

□ 공사개요 : 강교도장 3,176㎡, 표면보수 174.3㎡, 단면복구 63.8㎡

□ 도 급 자 : 극동에이엔씨(주) 대표 박종식

□ 공 정 율 : 75%

Ⅱ		보 고 내 용

□ 관련근거

○ 현장 실정 검토보고서(제2회) 제출

- 강교도장 구간 변경(조정) 및 강관 쌍줄 비계 높이조정

※ 서울시설공단 공사감독1처-2190(2023.5.15)

□ 실정보고 내용 (세부내용 #붙임)

1. 강교도장 작업구간 변경(조정)

○ 당초 오류철도고가보수공사는 ①교대(A1)~상행2선~상행1선 및 ②교대(A2)~하행2선~

하행1선의 강교 도장을 시행토록 되어있으나,

○ ②교대(A2)~하행2선~하행1선 작업 추진 중 교대(A2)~하행2선 사이 고배선이 위치하여

부천역 전기사업소 별도 선로작업 협의 등 전기사업소 자체 잦은 선로작업으로 인해

본공사 도장작업시 선로작업 미승인 등 작업지연으로 도장작업 구간 조정이 필요한 실정임.

❖ 강교도장 작업구간 변경(조정)

공 종 명	당 초	변 경	비고
강교 도장	① 교대(A1)~상행2선~상행1선	․ 당초대로 시행 (변경없음)
	② 교대(A2)~하행2선~하행1선	․ 상행1선~하행1선

○ 현황사진 및 평면도

A2

A1

당 초
변 경

○ 검토의견

- 강교도장 작업구간 중 ①철도 선로(교대(A1)~상행2선~상행1선)은 당초대로 시행하고,

②고배선(하행2선) 위험구간인 선로 (교대(A2)~하행2선~하행1선)에 대해서는 안전하고

원만한 작업을 위해 선로(상행1선~하행1선)구간으로 조정하는것이 타당한것으로 사료됨

2. 강관비계(쌍줄비계) 재설치 반영

○ 당초 설계서상 교대(A1)에 쌍줄비계를 설치하여 공사완료시 철거토록 되어

있으나, 동절기 작업중지 기간(2022.12.~2023.3.) 중 철도 운행 시 강관비계

(쌍줄비계) 저촉 위험등으로 철도 안전사고 예방을 위해 한국철도공사(코레일)

로부터 철거요청이 있어 쌍줄비계 철거 후 본작업 시행 전 재설치가 필요한

실정임.

※ 관련근거 : 한국철도공사 수도권광역본부 시설처-10885호(2022.12.13.)

○ 쌍줄비계 설치 횟수 및 면적 산출

구분	공 종 명	규 격	수 량	설치횟수	면 적	비고
당초	강관비계 설치/해체	쌍줄비계	폭 82.0m × 높이 6.0m	1회	492m²
변경	강관비계 설치/해체	쌍줄비계	폭 82.0m × 높이 5.6m (1회) h=5.4m (2회) h=5.8m	2회	918m²
▶ 쌍줄비계 높이 조정 : 철도 전차선 저촉으로 높이 조정함. (당초 6.0m→ 평균 5.6m)

※ 개략 공사비 : (증) 24,310천원(제경비 포함)

○ 현황사진

쌍줄비계 설치 전경(A1)	쌍줄비계 설치 전경(A2)

○ 검토의견

- 상기와 같이 동절기 작업중지 기간 중 철도 운행시 강관비계(쌍줄비계) 저촉 위험이

있어 쌍줄비계 철거 후 재설치함으로써 철도 안전사고 예방에 최선을 다하고자 하며,    높이조정등 물량 변경사항에 대해 본공사에 반영하는것이 타당한 것으로 사료 됨.

Ⅲ		검 토 결 과

□ 상기 현장실정보고(제2회)에 대한 검토결과 도장작업구간 변경 및            강관비계 높이조절등 설치회수 변경 사항에 대해 본공사에 반영 추진코자하며,     □ 물량 변경등으로 인한 공사비 변경(증) 부분에 대해서는 도급비 범위내

공사비를 사용하고, 추후 설계변경시 반영조치코자 함.

□ 개략 공사비 : (증) 24,310천원(제경비 포함)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2023. 05. 23 : 감독기관 통보(승인)

□ 2023. 05.~06. : 잔여공종 추진

□ 2023. 06월 : 설계변경 및 준공

따로붙임  관련문서(공사실정보고서 등) 1부.  끝.