아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(교량난간) 납품기한 연장요청(창동상계 연결교량 보행교)

우리부서에서 시행중인『창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 납품기한 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 연장

납품요구번호	품 명	규격	단위	납품 기한		비고
				당 초	변 경
12-21-*******00	교량난간	W2000×H1400mm	m	2021.12.23.	2024.03.31.

붙임 : 감리단 관급자재 납품기한 연장 요청서 1부.  끝.

	토 목 부 장
주무관	이상현		교량건설과장	代이회진		토목부장	05/25
이임섭
협조자
시행	토목부-9512	(	2023. 5. 25.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 도시기반시설본부 12층 토목부 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2144	/전송	02-6438-2199	/	sanghyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)