아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3차) 시행(2022년 강동구 시설물정비공사 및 성내1동외 9개동)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2022년 강동구 시설물정비공사 및 성내1동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 강동구 시설물정비공사 및 성내1동외 9개동 상수도공사(장기계속                    단가계약)

나. 도 급 자 : 광민공영(주)  대표 김준

다. 계약기간 : 2023.1.1. ~ 2023.6.30.(총 공사부기기간:2022.6.10.~ 2023.6.30.)

라. 설계변경 내용 : 신공종 발생 및 계약물량 증․감

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 부기금액	858,034,900	858,034,900	변동없음
1차 부기금액	416,719,000	416,719,000	변동없음
2차 부기금액	441,315,900	441,315,900	변동없음

바. 설계변경 사유 : 시공물량 증,감 및 신공종 발생 등으로 계약금액 변동

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(교체장애수전,불용관)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(대형상수도관세척)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보온재,                    음수대설치)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(노후밸브정비)

소방용수시설보수,시설비및부대비,시설비(소방용수시설보수)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 심의 의견서 1부.

3. 설계변경 내역서(3차) 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

안전관리팀장	강희창		시설관리팀장	김주경		시설관리과장	윤복철		강동수도사업소장	05/25
代신경숙
협조자	주무관	김지훈		주무관	이덕규
시행	시설관리과-8657	(	2023. 5. 25.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, (성내동)541-4	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5197	/전송	02-3146-5239	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)