문서번호	주택관리과-21574
결재일자	2023. 05. 26
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		주거환경개선팀장		주택관리과장	미래도시국장
조은빈		임은정		배호진	전결 05/26
					이정식
협조

- 충신윗 성곽마을 기반시설 정비공사(골목길 2구간 잔여분) -

설계변경(제1회,최종) 검토보고

미래도시국

주택관리과

- 충신윗 성곽마을 기반시설 정비공사(골목길 2구간 잔여분) -

설계변경(제1회,최종) 검토보고

충신윗 성곽마을 기반시설 조성공사(골목길2구간 잔여분)와 관련하여 공사시행에 따른 설계변경(제1회,최종) 보고드림.

충신윗 성곽마을 주거환경개선사업구역	공사 위치도(골목길 2구간 잔여분)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 충신윗 성곽마을 기반시설 정비공사(골목길 2구간 잔여분)

□ 위    치: 종로구 충신동 1-1번지 일대

□ 공사기간: 2022. 12. 16. ~ 2023. 05. 31.

□ 총공사비: 540백만원(시비/ 도급비 483, 관급비 44, 이전비 13)

□ 공사내용: 계단 정비(85.6㎡), 친환경판석 포장(230.4㎡), 노후관로 정비 1식

Ⅱ		추진경위

□ '19.03.07.: 충신동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업구역 지정

□ '20.12.31.: 기반시설 설계용역 준공

□ '21.03.31.: 기반시설 정비공사(우선 사업구간) 준공

□ '21.09.10.: 기반시설 정비공사(도로 및 골목길1구간) 준공

□ '21.12.31.: 기반시설 정비공사(골목길2구간 2-3구역) 준공

□ '22.12.16.: 기반시설 정비공사(골목길2구간 잔여분) 시행

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ 공사시행에 따른 민원 조치 공사 반영

- 친환경화강석 포장으로 인한 지하실 누수 민원 조치 → 습식 공법 변경

- 민원 발생으로 인한 골목길 및 계단 연장 시공

ㅇ 현장여건에 맞는 시공물량 증·감

- 건물 외벽 마감(페인트칠) 수량 증가(108㎡ → 569.4㎡ 증)

- 레진관 수량 증가(55개 → 67개 증)

□ 주요공종 물량 증·감 내역

공 종	규 격	단 위	물 량		증감
			당 초	변 경
친환경화강석 포장	T100	㎡	261.7	0	감) 20,518천원
친환경화강석 포장	T50	㎡	0	261.7	증) 28,210천원
레진관 접합 및 부설	ø300	mm	55	67	증) 1,692천원
안전방지턱 붙임	T80	㎡	18.1	0	감) 1,955천원
조합페인트(붓칠)	-	㎡	108	569.4	증) 7,482천원
하수관내 CCYV 조사	ø800	mm	53	0	감) 106천원

□ 공사금액 변경내역                                   (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총공사비		540,172,000	555,346,000	증) 15,174,000
	도 급 비	482,718,000	505,722,000	증) 23,004,000
	관 급 비	44,090,000	36,324,000	감) 7,766,000
	이 전 비	13,364,000	13,300,000	감) 64,000

Ⅳ		검토의견

□ 민원조치 공사 및 시공물량 변경에 따라 설계변경 계약 추진하여 준공처리하고자 함.

붙임: 설계변경 내역서 1부.  끝.