문서번호	토목과-6963
결재일자	2023. 5. 26.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		토목팀장		토목과장	안전건설교통국장
이기웅		성규상		代성규상	05/26
					신용철
협조
	재무과장		代이원용
	계약팀장		황미란
	마을공동체팀장		황성준

응봉교 하부 주민쉼터 조성공사 설계변경(정산) 시행 보고

응봉교 하부 주민쉼터 조성공사

설계변경(정산) 시행 보고

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

응봉교 하부 주민쉼터 조성공사

설계변경(정산) 시행 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 응봉교 고가하부 주민쉼터 조성공사

○ 기    간: 2022. 9. 1. ~ 2023. 5. 31.

○ 시 공 사: (주)현창산업

○ 총공사비: 361,110천원

(도급비 277,116천원, 관급비  60,584천원, 이전비 23,409천원)

□ 설계변경 사유

○ 정산에 따른 공종별 물량 증감 발생

○ 사토장 변경

- 수도권매립지를 기준으로 설계하였으나 반출이 불가하여 사토가 가능한 일반매립지 변경(운반거리 52㎞→57.5㎞)

- 운반비는 증가하나 입찰공고시 조건에 따라 당초단가 적용

○ 기타 변경사항 반영

- 원형 벤치 목재변경, 오일스텐 실시, 조명브라켓 제작, 현장강관철거,조경식재 변경, 레미콘 타설변경, 거푸집변경등

(참조 붙임 보고서 6부)

○ 건강·연금보험료 등 제경비 정산 시행

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함.

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감		비 고
총공사비	361,110,890	355,370,220	감	5,740,670
도 급 비	277,116,910	271,500,000	감	5,616,910
관 급 비	60,584,000	61,340,220	증	756,220
이 전 비	23,409,980	22,530,000	감	879,980

- 예산과목:

자치행정과, 주민주도의 마을공동체 조성, 마을공동체 활성화, 응봉교 하부 공간 주민쉼터 조성사업(보조), 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

붙임  1. 설계변경내역서 1부.
2. 계약금조정 검증확인서 1부.

3. 원가심사 의견서 1부.

4. 관련보고서 4부.  끝.