현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	오동근린공원 책쉼터 조성사업 조경공사 설계변경 시행

우리구 『오동근린공원 책쉼터 조성사업 조경공사』에 대하여 설계변경 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 오동근린공원 책쉼터 조성사업 조경공사

2. 공사내용 : 책쉼터 진입로 경사도 조정, 주변 수목 식재 등

3. 공사기간 : 2022. 12. 14. ~ 2023. 5. 31.

4. 도급금액 : *****************************

5. 도 급 자 : ************************************

6. 변경사유 : 현장 실정사항 반영에 따른 물량 조정, 제경비 정산(보고서 별첨)

7. 설계변경 금액 : ************

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총 공사비		235,532,920	337,005,110	증 101,472,190
도 급 비	공급가액	200,836,273	283,305,819	증 82,469,546
	부 가 세	20,083,627	28,330,581	증 8,246,954
	소 계	220,919,900	311,636,400	증 90,716,500
관급자재비		14,613,020	25,368,710	10,755,690

8. 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 공원확충, 도심공원 확충, 공원 내 책쉼터 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	김동영		공원기획담당	代안지연		공원녹지과장	김병완		도시관리국장	05/26
이창구
협조자	계약담당	代최은경		재무과장	代김미경
시행	공원녹지과-11497	(	2023. 5. 26.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3665	/전송	02-2241-6565	/	kdy2644@sb.go.kr	/	부분공개(5)