문서번호	기술심사담당관-35943
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	기술심사담당관
장연수		정회곤	12/20
			이임섭
협 조

- 방화1-8 소구역 하수관로 정비사업 - 설계경제성(VE) 검토 실행계획

2022.12.

기 술 심 사 담 당 관

방화1-8 소구역 하수관로 정비사업 -

설계VE 운영협의회 개최계획

강서구 물관리과에서 시행 중인 ｢방화1-8 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역｣에 대해 설계VE 운영협의회를 구성하고, 아래와 같이 회의를 개최코자 함

1		추진 근거

□ 2021년 설계경제성(VE) 검토 운영계획(행정2부시장 방침 제6호, ‘20.1.14)

□ 서울특별시 설계경제성(VE) 검토 운영지침(’21.1.14.)

□ 설계경제성(VE) 검토 의뢰(강서구 물관리과-202237호,‘22.12.13.)

2		사업개요

□ 신청부서: 강서구청 물관리과

□ 위    치: 강서구 방화동, 마곡동, 공항동 일원

□ 사업내용: 하수관로 개량

*******************************************************

*********************************

************************

3		운영협의회 협의결과

□ 운영협의회 검토의회 개요

○ 검토일시 : '22.12.15.(목) 10:30

○ 검토위원 : 기술심사담당관(위원장), 토목심사팀장(간사),

기술관리팀장, 건축심사팀장

○ 검토결과

-「건설기술진흥법 시행령」에 의거한 설계경제성(VE) 검토 대상사업(총공사비 100억원 이상)이므로 검토함이 타당함

□ 운영협의회 협의결과: 기술심사담당관 위탁검토 시행

4		설계경제성(VE) 검토 계획

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 추진방법 : 설계경제성 검토 소위원회 구성

○ 설계경제성 검토 소위원회, 발주부서, 설계사 등 13명 내외 참여

구 분	구 성 원	역 할
총 괄	위원장 이임섭 기술심사담당관 간 사 정회곤 토목심사팀장 설계VE 담당 장연수 주무관	․ 설계경제성(VE) 검토 계획 ․ 회의 지원 등
리 더	박태준 (주)비엠글로벌산업	․ 워크숍 준비, 진행 ․ 결과보고서 작성
진행보조요원	강혜선 (주)비엠글로벌산업	․ 워크숍 준비, 보조 ․ 결과보고서 작성보조
외부 검토위원 (4명)	(상하수도) 도중호 위원 삼보기술단 (상하수도) 조형근 위원 (주)장원 (토목시공) 고홍석 위원 동해종합기술공사 (토 질) 김종우 위원 동부엔지니어링(주)	․ 기능 분석 ․ 기술 검토 ․ 아이디어 제안 및 평가 ․ 제안서 작성
발주부서	강서구청 물관리과 홍성일 팀장	․ 사업설명, 제안서 검토
설계자	(주)삼안 김보성 이사	․ 사업설명회 준비 ․ 제안서 원가분석 등

□ 설계VE 회의 세부일정

일 시	내 용
′22.12.27.(화)10:00~17:00 (워크숍 1일차)	- 사업설명 및 질의응답, 성능평가, 기능분석, 현장답사 ‣ 장소: 기술심사담당관 회의실(대면회의 예정)
′23.1.5.(목) 10:00~17:00 (워크숍 2일차)	- 검토회의 : 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ‣ 장소: 기술심사담당관 회의실(대면회의 예정)
′23.1.17.(화) 10:00~17:00 (워크숍 3일차)	- 검토회의 : 구체화검토 및 발표, 아이디어 평가, 대안선정 ‣ 장소: 기술심사담당관 회의실(대면회의 예정)
'23.01.18.(수)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청) (기술심사담당관 ⇒ 강서구청 물관리과)
'23.01.31.(화)	- VE 제안 채택결과 회신 (강서구청 물관리과 ⇒ 기술심사담당관)
'23.02.10.(금)	- 설계경제성 심사(VE) 결과 통보 (기술심사담당관 ⇒ 강서구청 물관리과)

5		행정사항

□ *************

******************

**************************************

******************************************

*************************************

※「설계경제성VE 검토 위원 수당 개선」(기술심사담당관-1591, ’22.1.27.)에 따라 산출

*******************

○ 지급부서┍ 위원수당: 요청부서(강서구청 물관리과)

┕ 회의운영비: 기술심사담당관

□ 향후 추진계획

○ 설계경제성(VE) 검토 결과 통보('23. 2월 중)

붙임: 설계경제성(VE) 검토 요청서 1부.  끝.