문서번호	환경녹지과-3388
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	녹지관리팀장	환경녹지과장
김종찬	代진덕성	05/30
		강병기
협 조

2023년 매립지사면 피복식재 중간 보고

2023. 5.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

2023년 매립지사면 피복식재 중간 보고

□ 5월 말 현재 추진 실적

• 5. 1.~5. 20. 자재 준비

- 일반구매 : 황마씨마대, 텃밭흙, 커피마대, 철근팩 등

- 조달구매 : 줄사철식물매트, 배양토

• 5. 22.~5. 31. 식재기반 조성

- 노출된 쓰레기층 위에 흙을 넣은 커피마대로 1차 피복

- 커피마대 위에 황마씨마대로 2차 피복

(※ 2차 피복은 황마씨마대와 줄사철식물매트를 1/2씩 사용)

□ 향후 추진 계획

• 6. 20.~6. 30. 줄사철식물매트로 2차 피복

- 평년 장마 시작일이 약 6월 25일(중부지방)인 점을 고려하여, 일기예보에 기반하여 줄사철식물매트 피복 시기를 결정할 예정임.

□ 행정 사항

• ***************

****************************

**********************************  끝.