문서번호	기반시설과-3727
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정영환		이병철	05/30
			김종호
협 조
	주무관			정용호
	주무관			안재선
	주무관			황대훈

2023년 한강공원 신설 부상형 화장실

부력체 신기술·특허공법 선정위원회 개최(안)

2023. 5.

한강사업본부

(기반시설과)

- 2023년 한강공원 신설 부상형 화장실 -

부력체 신기술·특허공법 선정위원회 개최(안)

2023년에 신설할 부상형 화장실의 부력체 설치를 위한 신기술특허공법 선정위원회를 아래와 같이 개최하고자 함

1		관 련 근 거

□『건설기술진흥법』시행령 제34조(신기술의 활용 등)

□『지방자치단체 입찰 및 집행기준』제4장(제한입찰 운영요령 별표2) 및 동 기준 제1장 제12절(신기술·특허공법 선정기준)

□『하천점용허가 세부기준』제28조의2(이용객 편의시설)

○ 하천 내 공작물을 설치하는 경우 홍수에 대비 이동식이거나 부유식 구조로 우선 설치 고려

2		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 2023년 한강공원 신설 부상형 화장실 부력체 신기술·특허공법 선정위원회 개최

□ 사업규모 : 이동형 화장실 3개동 부상형 부력체 설치

○ 부력체 규격 : 가로 8.3m x 폭 6m x 높이 1.2m (두께 7t) 이상

- 신규 화장실 규격 : 7.8m×3.4m(3개동)

○ 사업기간 : '23. 8. ~ '24. 5.

○ 사업예산 : 900백만원(부력체 설치)

□ 사업위치 : 반포한강공원(2동), 양화한강공원(1동)

3		선정위원회 개최 계획

□ 심사개요

○ 심사건명 : 한강공원 신설 부상형 화장실 부력체 선정을 위한 신기술·특허공법 선정

○ 심사일시 : 2023. 6. 22.(목) 예정

○ 심사장소 : 한강사업본부 2층 대회의실

※ 개최일정은 재공고 등 진행 여건에 따라 변경

○ 심사위원 : **************************

구분	총원	선박, 부력체, 구조안전 전문가	토목구조 및 시공 관련 전문가 등	비고 (추첨번호)
예비평가 위원수	21	12	9	-선박부력체 전문(1~12번) -토목 관련 전문(13~21) ※분야별 별도 추첨실시
선정평가 위원수	7	4	3

※ 신기술·특허공법 선정위원회 예비평가위원 명부 : 별첨1

○ 심사방법

- 신기술 특허공법 제안업체 10분간 발표 후 10분내 질의 응답

- 심사위원회 검토 의견 및 배점에 따라 특허공법 선정

□ 심사내용

○ 심사대상 : 부유식구조물(부력체) 신기술·특허공법

○ 심사내용 : 정성적 평가

- 특허공법 시공성 및 안전성

- 부력체 유지관리 및 경관성

※ 정량적평가(공사비 및 경영상태)는 발주부서가 평가

○ 선정기준

- 정량적평가 및 정성적평가를 합산하여 최고점수 업체를 1순위로 선정

- 최고점수가 동점일 경우 정성적 평가 점수 순위로 선정하고 정성적 평가 점수도 동일한 경우 시공성, 안정성, 유지관리성 순의 점수로 선정하고 위 평가에서도 같을 경우 추첨으로 정함

- 최초 공고 시 제안 참여자가 1인 이하인 경우 재공고 하되 재공고 결과에도 제안 참여자가 1인인 경우 공법선정위원회에서 공법 평가 후 선정

○ 배점기준

정량적평가(20점)		정성적평가(80점)
공사비	경영상태	시공성	안전성	유지관리	경관성
10	10	25	25	20	10

※ 공사비 : 서울시 표준안 적용(균형가 산정 균형가에 근접한 제안자에게 높은 가격점수 부여-차등률 5% 적용)

※ 경영상태 : 신용평가 등급 적용

4		행 정 사 항

□ 신기술·특허공법 선정 안내공고('23. 6. 1.)

○ "서울시 홈페이지" 및 "건설알림이"에 공고

□ 선정위원 심사수당 지급

○ 관련근거 : 『서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급조례 시행규칙』 제2조 제1항

○ 소요예산 : 1,400,000원(7명×200천원)

○ 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 사무관리비(201-01)

5		향 후 일 정

□ '23. 6. 23. ~  : 결과 보고 및 기술 협약(설계반영)

□ '23. 8. ~ 12. : 계약 및 시공 추진

붙임 1. 평가위원 예비명부 1부.

2. 공고문('23년 부력체 신기술 특허공법 선정)  1부.

3. 기술제안서 작성지침(제안서 작성 양식 포함) 1부.

4. 신기술특허사용협약서 및 물품공급기술지원협약서 각 1부. 끝.