문서번호	급수운영과-8715
결재일자	2023. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
장형준	전동근	박종일	05/30
			박기용

『2022년 포장도로 굴착복구공사』발주계획 보고

『2023년 포장도로 굴착복구공사』

발주계획 보고

2023. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2023년 포장도로 굴착복구공사』

발주계획 보고

우리 사업소에서 공사 시행하고 있는 『2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』시행 관련, 발주를 시행코자 보고드림

☐ 공 사 개 요

ㅇ 추진근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24조(장기계속계약) 및 25조(단가계약)

ㅇ 공 사 명: 2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사내용: 아스팔트 포장(소파보수) 51a, 보도블록포장 11a

아스팔트(표층) 32a, 아스팔트(중층) 5a

ㅇ 소요예산(단위 : 원)

구분	총공사비	도급비	관급비	비고
금액	2,600,000,000	2,000,000,000	600,000,000

☐ 보 고 내 용

ㅇ 발주 사유

- 『2022년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(2차)』계약이 2023.6.30. 만료될 예정으로 지속적인 민원처리를 위해 『2023년 포장도로 굴착복구공사』에 대하여 발주코자 함

ㅇ 발주 계획

- 계약방법: 장기계속단가계약

- 계약기간(총부기기간): 착공일로부터 2024.6.30.까지

·1차수: 착공일 ~ 2023.12.31.까지

·2차수: 2024.1.1. ~2024. 6. 30.

- 차수별 예정 이행금액

·1차수: 금1,200,000,000원

·2차수: 금800,000,000원

- 공사비 산출

·물량산출 : 장기계속공사 절차에 따라 설계내역서의 예정물량은 3년치(2020~2022년)물량을 평균하여 산출

·주요적용 사항

▶  2023년 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 적용

▶  2023.1.2.일자 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 적용

- 추진 계획

·2023.05.: 계약심사(안전조사과)

·2023.05.: 일상감사(공공감사담당관) 및 전문공사 사전검토(건설혁신과)

·2023.06.: 공사발주(본청 재무과)

·2023.07.: 공사착공

☐ 조 치 의 견

ㅇ 상기 보고 내용과 같이 "2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사" 을 발주하여 사업을 원활히 추진코자 함

붙임: 설계내역서 및 공사설명서 각 1부.  끝.