아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고(3회) 검토결과 통보

1. 공사감독1처-6989(2023.5.24)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독업무 시행중인 "오류철도보수공사"와 관련 "현장실정보고(3회)"사항에 대한

검토결과를 아래와 같이 통보하오니, 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : "승인"

-“경량시스템 비계 설치방법 변경(조정)"

▶ 당초: 일괄설치(교대~상행2선~상행1선)

·경량시스템비계 설치/해체 : 11,419㎡

·비계발판 설치/해체 : 2,080㎡

▶ 변경: 분리설치(교대~상행2선, 상행2선~상행1선, 상행1선~하생1선)

·경량시스템비계 설치/해체 : 7,387㎡

·비계발판 설치/해체 : 2,268㎡

나. 기타내용

- 내역에 반영되는 신규공종에 대하여는 낙찰율 적용 등 관련 근거를 반드시

확보(첨부)하여 실 정산 조치.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 05/30
임형규
협조자
시행	시설보수과-4560	(	2023. 5. 30.	)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1), 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7972	/전송	02-2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개