문서번호	조경과-6109
결재일자	2021. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경과장	관리부장
이옥하		김강환	09/13 오성문
협 조

- 동물원 정문 및 광장 개선 공사 -

조경분야 현안사항 검토보고(3회)

2021. 9.

서울대공원

( 조 경 과 )

- 동물원 정문 및 광장 개선 공사 -

조경분야 현안사항 검토보고(3회)

「동물원 정문 및 광장 개선 공사」조경분야 감독업무 수행 중 아래와 같이 시공사로부터 실정보고가 발생하여 검토 보고함

1		공 사 개 요

□ 위    치 : 경기도 과천시 서울대공원 동물원 정문 일대

□ 공 사 명 : 서울대공원 동물원 정문 및 광장 개선 공사

□ 공사규모 : 동물원 광장 15,710㎡, 건축연면적 485.02㎡

□ 공사기간 : 2020.10.14.~2021.12.10.(장기계속)

□ 도급금액 : *************************************

***************************************

□ 공사업체 : 토건-㈜마노종합건설 대표 정봉휘, 조경-(주)한울조경산업 대표 우성우

2		현안사항 검토

□ 현안사항(실정보고내용)

○ 1984년 조성된 기존 정문은 설계시 추억쉘터로 명명하여 존치키로 하였으나 현장여건 변화에 따라 하부기둥(콘크리트벽체) 및 돌출된 기초 보완 필요

- 기둥 벽체는 콘센트, 각종 시설 흔적 등으로 상태 불량하여 보완 필요

- 기둥 기초콘크리트가 계획된 포장 높이보다 20cm 돌출되어 있고, 안전상 철거 곤란하여 보완 필요

⇒ 7.15. 원장님 현장 점검 시 구두 보고 : 목재데크로 마감하여 쉼터로 활용

(총 5개소 중 금회 2개 보완, 나머지는 2단계에서 보완)

☞ 개략공사비 ***********

기존 정문(하부 콘크리트 기둥, 기초 노출)	기둥 및 기초 마감 변경(목재마감)

○ 현장여건 변화에 따른 식재 수종 및 수량 변경

- 품귀현상으로 수급 곤란한 일부 수종 변경 및 수량 조정

(가침박달나무, 까마귀밥나무→수수꽃다리, 이스라지)

- 경관 향상 위해 수목 하부 초화류 일부 보완 은사초, 애란 등 식재

- 관리의 용이함을 위해 고객도움터 옥상녹화지역 멀칭재 변경: 바크→화산석

☞ 개략공사비 ************

○ 공사기간 연장에 따른 현장사무실 손료 변경

- 현장사무실, 창고 설치 기간 변경(6개월→12개월)

☞ 개략공사비 *********

□ 세부 증·감 내역

○ 개략공사비 증·감 내역 : **********

○ 세부 물량 증·감 내역

공 종		규 격	단위	물량			비고
				당 초	변 경	증·감
조경공사
시설물공사	기존 정문 기둥 및 기초 마감	T21,부켈라	개소	*	*	*
식재공사	가침박달나무	H1.2×W0.5	주	**	*	***
	수수꽃다리	H1.5xW0.6	주	**	***	***
	까마귀밥나무	H0.4xW0.4	주	**	*	***
	이스라지	H1.2	주	***	***	***
	은사초	8cm		*	***	***
	애란	8cm		*	***	***
	바크	관목,초화용	포	***	***	***
	화산석 포설	T30, 흑,적	㎡		***	***
가설공사	현장사무실, 창고	6개월	식	*	*	**
		12개월	식	*	*	*

3		검토 및 회신내용

□ 검토 및 회신내용

○ **************************************

단위: 천원

구분	실정보고내용	검토 및 회신내용	개략공사비(증·감)
1	▶ 시설물공사 → 기존 정문 하부기둥 및 기초 보완 (목재마감)	- 현장여건 변화 반영 및 경관 향상을 위해 필요하므로 변경 승인	*******
2	▶ 식재공사 → 일부 수종 및 수량 변경 → 바크 물량 감, 화산석 추가 반영	- 변경 승인	********
3	▶ 가설공사 → 현장사무실,창고 설치기간 증가로 손료 변경 (6개월→12개월)	- 변경 승인	*****
계			*********

4		조치의견

□ 조치의견

○ *******************************************************************.

□ 예산 확보 방안

○ ******************************

○ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 동물원 정문 및 광장 환경개선, 시설비및부대비, 시설비.

붙임. 실정보고서1부.  끝.