아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	설계변경 자문 심사 요청(공중화장실 리모델링 공사 설계변경)

1. 한강사업본부 시설관리과-4730호(21.08.12.), 4730호(21.08.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 의거 우리부서에서 추진 중인 『한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 공사』의 설계변경에 대하여 심사 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 화장실 부상형 전환 공사

- ******************

- 공사내역 : 화장실 11동 부상형 부력체 설치 공사

나. 설계변경 사항

- 공사 도급액 변경 : ************

• ******************

• ******************

- 변경사유

• 부상형 전환 화장실 2동 감소

• 래미콘 파동 등으로 관급 물량 감소 및 도급물량 증가

• 출입로 데크 기초물량 추가 등

다. 변경내역 : 붙임 내역서 참조

붙임  1. 화장실 부상형 전환 공사 변경내역 1부.   끝.

	기 반 시 설 과 장
주무관	정영환		기반시설과장	05/31
이병철
협조자
시행	기반시설과-3737	(	2023. 5. 31.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 서울특별시 한강사업본부 시설부 기전설비과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0670	/전송	02-3780-0744	/	toncar9@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)