아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계용역 기간 연장에 따른 변경계약 의뢰

우리 본부에서 시행하고 있는 「잠실운동장 주경기장 리모델링 설계용역」에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 잠실운동장 주경기장 리모델링 설계용역

○ 용역기간 : 2020.1.15 ∼ 2022.5.31.

○ 계 약 자 : (주)나우동인건축사사무소 외 4개사

○ 계약금액 : 금일백사십사억원정(₩14,400,000,000원)

나. 연장내용

○ 용역기간

- 당초 : 2020.1.15. ∼ 2023.5.31.

******************************

********************************

******************

붙 임 1. 용역기간 연장 검토보고 1부

2. 용역기간 연장 의뢰서 1부.

3. 용역기간 연장 공문 및 합의각서 각 1부.  끝.

	동남권추진단장
주무관	박수연		공공사업팀장	소영수		동남권사업반장	05/31
김동철
협조자	계약총괄팀장	김형구
시행	동남권추진단-4755	(	2023. 5. 31.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 본관 3층 동남권사업과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8251	/전송	02-2133-0740	/	gogogirls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)