아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역 변경계약 의뢰

정수과-4074(2023. 5. 31.)호와 관련, 사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역의 변경계약을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 사업장폐기물(무기성정수오니) 처리용역 단가계약(장기계속)

나. 계약업체 : *******************************

*****************************

다. 용역기간 : **************************

라. 계약금액 : ********************************

마. 변경내역

구 분	당 초 (톤)	변 경 (톤)	증, 감	비 고
총용역물량(톤)	14,000	14,000	변경없음
총계약부기금액	1,011,318,000	1,011,318,000	변경없음
계약 기간	'22. 6. 1.~'23. 5. 31.	'22. 6. 1.~'23. 6. 15.	15일 연장

바. 변경사유 : 용역 완수에 따른 정산 및 서류검토에 필요한 계약기간 연장

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임 :  1. 합의서 1부.  끝.

	정 수 과 장
주무관	홍기웅		정수과장	05/31
代이금재
협조자
시행	정수과-4078	(	2023. 5. 31.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, (성수동1가)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5544	/전송	02-3146-5509	/	albatross@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)