문서번호	동남권추진단-4748
결재일자	2023. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업반장
박수연		소영수	05/31
			김동철
협조	주무관		김민서
	주무관		이종령

- 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 -

설계용역 기간 연장(4차) 검토 보고

2023. 5

균형발전본부

(동남권추진단)

「잠실종합운동장 주경기장 리모델링」

설계용역 기간 연장(4차) 검토 보고

□ 관련근거

○****************************************************

***************************************************************

********************************************************************

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠실운동장 주경기장 리모델링 설계용역

○ 용역업체 : ㈜나우동인건축사사무소 외 4개사

○ 용 역 비 : 144억원 (전액 현대차GBC 공공기여)

○ 용역기간 : 착수일로부터 40.5개월 (‘20.01.15 ~‘23.05.31)

□ 추진경과

○ ‘20.01.15 : 설계용역 착수

○ ‘20.08.14 : 계획설계 완료

○ ‘21.04.26 : 기본설계 규모조정 방침 및 실시설계 이관(⇒도기본)

○ ‘22.01.14 : 설계용역 연장(1차)

▶ (기간)'20.1.15~'22.1.14 → '20.1.15 ~‘22.8.31(7.5개월 연장)

(사유) *****************************************

○ ‘22.08.26 : 설계용역 연장(2차)

▶ (기간)‘20.1.15 ~‘22.8.31 → ‘20.1.15 ~ '23.1.31(5개월 연장)

(사유) ****************************

○ ‘23.01.30 : 설계용역 연장(3차)

▶ (기간)‘20.1.15 ~‘22.1.31 → ‘20.1.15 ~ '23.5.31(4개월 연장)

(사유) *************************

○ ‘23. 2 : 실시계획인가 및 사업시행자 지정

○ ‘23.  4 : 착공 전 이행사항 완료(지하안전평가 협의, 구조/굴토/해체 심의)

변경 전	변경 후	비고
'20.1.15 ~ '23.5.31	********************	*****

□ 용역기간 연장검토

○ 용역기간 변경내용

○ 연장사유 : ************************

○ 도시기반시설본부(건축부) 검토결과

- ******************************************************************************************************************************************************

[건설사업관리단 의견]

**********************************************

*****************************

**********************************************

****************************************

********************************************

******************************************

*********************************************

○ 지연배상금 검토

- *******************************************************************************************

□ 향후계획

○ 용역기간 연장 의뢰(⇒ 재무과)

붙임 : 설계기간 연장 요청 공문 및 연장 의뢰서 각  1부.  끝.