문서번호	교통운영과-7864
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
서영호		김세교	06/01
			김상신
협조

교통사고 잦은 곳 개선지점 변경시행보고

(강남구 삼성동 현대백화점 교차로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.5

도시교통실

(교통운영과)

교통사고 잦은 곳 개선지점 변경시행보고

(강남구 삼성동 현대백화점 교차로)

23년 교통사고 잦은 곳 개선사업 시행건 중 “강남구 삼성동 현대백화점 교차로” 개선건에 대하여 사업시행자 변경 검토 사항을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 대상 지점 : 강남구 삼성동 현대백화점 교차로

○ 공사 개요 : 횡단보도이전 2개소(신호 설비 등), 노면표시, 안전표지, 기타 공사

○ 소요 예산 : 286,528천원 (구청: 228,097천원, 도로사업소: 58,431천원)

○ 시행 부서 : 강남구청(토목), 동부도로사업소(신호기공사, 노면표시 등)

□ 검토 내용

실시설계 도면

○ 공사지점) 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사(4공구) 지장물 이설공사중

- 현대백화점앞 교차로는 현재 영동대로 지하공간 복합개발 건설 본공사전에

시공사인 롯데건설(주)에서 하수도관, 전력구 이설공사를 시행중임.

- 이설공사 완료 후 복구공사시 교통사고잦은곳 개선공사 원인자복구 협의 필요

○ 원인자복구 협의) 도로점용공사장 공사중 교통소통대책 자문회의시

- 우리과에서 시행중인 도로점용공사장 공사중 교통소통대책 자문회의시 개선 현황을 반영하여 원인자 복구토록 조건부 승인하여 예산절감 도모

□ 조치 의견

○ 현대백화점앞 교차로 개선은 영동대로 지하공간 복합개발공사(4공구) 시공사롯데건설(주)로 하여금 공사토록, 도로점용공사장 공사중 소통대책 추가 자문회의시 개선현황을 반영하여 원인자 복구 조건부 승인코자 하며,

○ 원인자 복구로 남는 잔여예산은 타공사 지점 부족예산에 충당하여 사업관리에 만전을 기하고자 함.

- 예산조정 현황 (현대백화점앞 개선공사비 감액: 286,528천원)

예 산 과 목 (세부사업명)	예산액	기배정액	금회조정 배정액	배정잔액
도시교통체계 및 소통개선 교통소통 및 안전관리강화 (교통사고 잦은 곳 개선 시설비 202-401-01)	7,178,000	1,367,222	5,510,850	299,928

붙임: 개선도면, 예산 재배정 세부조정내역 각 1부.  끝.