급수공사 연기 보고서(개량-58)

시    행

급수운영과-9037

시행일자

2023. 6. 2.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

대시민공개

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
최박		代김종섭	06/02
			이규희
협 조

명에 의거 삼전동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공사명: 2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사

○ 계약상대자: 다성엔지니어링(주)  대표 임규성

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	잠실동 1168-1 외 1개소	개량-58	2022. 5. 19.~ 2023. 6. 2.	2023. 5. 19.~ 2023. 6. 30.

○ 연기사유

- 도로 굴착 허가 지연으로 인한 공사 연기

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기

붙임  급수공사 연기원 1부(별첨).  끝.