문서번호	기반시설과-3833
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정영환		이병철	06/02
			김종호
협 조
	주무관			안미희
	주무관			황대훈

한강공원 이동형 화장실 부상형 전환

기반시설공사 설계변경 검토(안)

2023. 6.

시설부 기반시설과

한강사업본부

기반시설과

한강공원 이동형 화장실 부상형 전환

기반시설공사 설계변경 검토(안)

『한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 기반시설 공사』의 원할한 추진을 위하여 설계변경(준공 연장)을 검토하고 보고드림.

□ 공사개요

○ 건    명 : 한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 기반시설공사

○ 공사규모 : 화장실 11동 이동 및 상수도 및 오수관 재설치 등

○ 공사기간 : '22. 12. 09. ~ '23. 6. 11.

○ 도 급 비 : **********************************

○ 도 급 사 : *********

□ 설계변경 검토

○ 변경 사항 : 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
****	'************'*******	'************'*******	******

※ 물량 및 금액 변동 없음

○ 변경***

********************************************************************

- *************************************************************

□ 향후 추진

◯  '23. 06. 03.  설계 변경 계약 의뢰(본부 총무과)

◯  ~ '23. 08. 31.  공사 준공

붙임  합의각서.  1부.  끝.