문서번호	급수운영과-8959
결재일자	2023. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이재헌		전동근	06/01
			代신중선
협조
	주무관		반건모

『2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)』

사토장 변경 관련 검토 보고

2023. 6.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)』

사토장 변경 관련 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중 인『2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련하여, 계약상대자인 다옴토건 주식회사 대표 ***로부터 사토장 위치 변경에 대한 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토내용을 보고드림

□ 관련공문

ㅇ 토사 반입불가 회신[수도권매립지관리공사 매립부-1433(2023.5.30.)

ㅇ 실정보고[다옴토건 주식회사 2023-060-001(2023.5.31.)]

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사기간: ****************************************

ㅇ 도 급 액: *******************************

ㅇ 도 급 자: 다옴토건 주식회사 대표 ***

ㅇ 공사개요: *****************

☐ 변경사유

ㅇ 수도권매립지로부터 토사 반입불가 통보에 따른 사토장 변경필요

- 공사장에서 발생되는 토사를 수도권매립지에 반입 요청하였으나, 수도권 매립지공사로부터 골재 혼합 등의 사유로 반입 불가됨

- 상수도(소규모) 공사장 굴착 시 발생되는 토사는 대부분 골재(아스콘 및 콘크리트 폐기물 등)가 혼합되어 있어,

- 매립지에서 요구하는 양질의 잔토는 반입이 어려운 실정으로, 토사를 반입할 수 있는 대치 부지에 대한 선정이 시급하다고 판단됨

☐ 검토내용

ㅇ 대체 사토장 선정 및 공사비 증⋅감내역

- 대체 사토장 선정

***************************************************************************************************

※ 개발행위허가증 및 기타 서류 적정 확인

- 공사비 증⋅감내역

**********************************************************************************************************************************************

※ 위치 변경으로 인한 운반거리 감소에 따른 예산 절감(기타 제비율 감액 ********)

ㅇ 검토의건

- 사토장 실사 결과, 운반거리 감소에 따른 예산 절감(공사비 감액)으로, 상기 위치로 사토장을 변경코자 함

☐ 행정사항

ㅇ 사토장 변경에 따른 승인 통보

- 계약상대자인 다옴토건 주식회사 ****** 및 감리사 ㈜대한콘설탄트 ******에게 변경된 사토장에 대하여 승인 통보

ㅇ 해당 공종 설계변경 적용 시행

- 향후 설계변경 시 조정(감액) 적용 시행

붙임: 1. 토사 반입불가 회신 1부.

2. 실정보고 및 내역서 1부.  끝.