문서번호	시설관리과-9753
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
고원석	김진성	06/02
		문병희

현장 실정보고서 검토보고(8차)

【2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사】

2023. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장 실정보고서 검토 보고(8차)

『**************************』와 관련하여 서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

【*****************************】

공사현황

가. 공 사 명 : **************************

나. 공사기간 : *****************************

다. 도 급 액 : **************

라. 공사개요 : *******************

마. 도 급 자 : ******************

바. 공사감독 : *****************

시설공단 실정보고 내용 및 검토의견

*******

1. 현황 및 문제점

ㅇ 부단수 차단 작업 전 천공 및 샌드위치 밸브 설치 작업으로 인한 굴착 발생

ㅇ 기존관 시·종점부 연결 시 기존관 확인 및 심도에 따른 접합부 굴착 증가

ㅇ 관 부설 중 한전, 하수관 등 다수의 지장물로 관부설 및 밸브실 설치를 위한 토공 확폭 및 심도증가 발생

2. 감독 검토의견

*****************************************

*********************

*******************

***	****	*****	*****	**
*	***	***	***	***********
*	***	***	***	***********
*	***	***	***	***********
***	***	***	***	***********
***	***	***	***	********
***	***	***	***	***********
***	***	***	***	********
***	***	***	***	***********
***	***	***	***	********
***	***	***	***	***********
***	***	***	***	********
*	***	***	***	***********
*	***	***	***	***********
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	*******************
**	***	****	***	************
**	***	***	***	**************
**	***	***	***	**************
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	*****************
**	***	***	***	************************
**	***	***	***	***********************
**	***	***	***	***********************
**	***	***	***	*********

※ 상세도 붙임 참조

ㅇ 부단수 차단 작업은 하루에 작업이 불가하여 사전작업(천공 및 샌드위치 밸브 설치 등)을 진행해야 하므로, 사전작업에 따른 토공 반영은 적정한 것으로 판단됨.

ㅇ 시·종점부의 기존관 연결 시 기존관 심도 등으로 인한 심도 증가 및 확폭에 대한 굴착분의 토공 반영은 적정한 것으로 판단됨.

ㅇ 한전 및 하수관 등, 지장물로 인한 하월 및 우회작업시 추가 굴착 증가분에 대한 토공 반영은 적정한 것으로 판단됨.

3. 개략공사비 : ***********

수도사업소 검토의견

*******

-****************************************************

조치계획

상기 검토내용을 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 안전 시공 및 설계변경 업무에 만전을 기하도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 공사 실정보고서 제출(8차) 1부.

2. 공사 실정보고서(8차) 1부.

3. 시공사 실정보고 1부.  끝.