문서번호	기반시설과-3832
결재일자	2023. 6. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정영환		이병철	06/02
			김종호
협 조
	주무관			황대훈

한강공원 이동형 화장실

부상형 전환 공사 설계변경 검토(안)

2023. 6.

시설부 기반시설과

한강사업본부

기반시설과

- 한강공원 이동형 화장실 -

부상형 전환 기반시설공사 설계변경 검토(안)

『한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 공사』 관련 전환대상 화장실의 공사 물량이 조정되어 설계변경 하고자 함.

1		사업개요

□ 사 업 명 : 한강공원 이동형화장실 부상형 전환

□ 사업기간 : ’22. 12.  ~ ’23. 6. 30.

□ 사업내역

○ 한강공원 이동형 화장실 11개동 부상형 전환

계	광나루	난지	망원	이촌	반포	여의도
11(동)	2동	1동	4동	2동	1동	1동

○ 계약현황

- 계약내용 : 공사 및 관급자재 등 분리 계약

- 총공사비 : 3,188,275천원

(단위 : 천원)

연 번	구 분	규 모	계약금액	추진내용
	계		3,188,275
1	화장실 부상형 전환공사	11개소	3,070,000	부력체 제작 및 출입로 데크 등 설치 공사
2	관급자재 구매	728톤	118,275	레미콘 등 5종 조달 구매

○ 진행현황 : 공정률 75%

- 완료공정 : 기초 콘크리트 타설 및 부력체 설치 완료

- 진행고정 : 출입로(장애인 램프 및 데크 설치) 공사 진행 중

2		변경 계획

□ 물량 변경

○ 부상형 전환 화장실 감소 : 11동  → 9동 (△ 2동)

구 분		계	광나루	난지	망원	이촌	반포	여의도
부상형 전환 화장실	변경 전	11동	2동	1동	4동	2동	1동	1동
	변경 후	9동	2동	1동	4동	1동	0	1동
	변동(감)	△2동				△1	△1

○ 감소 사유(부상형 전환 물량 2동 감소)

- 이촌 보광나들목 화장실 : 어린이놀이시설 주변 안전 확보 필요

- 반포 원불교 앞 화장실  : 부상형 기능 불필요(침수지역 아님)

※ 관련 공문 : 환경수질과-3549, ‘23.05.02. 화장실 부상형 전환 지점(2동) 공사 취소

○ 공사자재 물량 조정

- 전환공사 2동 분량의 자재량 감소

- 레미콘 파동(납품 지연)으로 콘크리트 타설에 필요한 관급 물량 납품 지연에 대해 사급 레미콘 물량 대체(출처 :이투데이, 대한경제 DB ’23.3월)

- 화장실 출입로 하부 보강 자재 물량 등 일부 증가

□ 금액 변경

○ 금액 변경 : 총 3,170,052천원 → 2,818,769천원(351,283천원 감액)

(단위 : 천원)

연번	구 분	변경 전		변경 전		감 액
		수량	금 액	수량	금 액
	계		3,170,052		2,818,769	△ 351,283
1	화장실 부상형 전환공사	11동	3,070,000	9동	2,775,905	△ 294,095
2	관급자재 구매(레미콘 등 5종)	728톤	100,052	153톤	42,864	△ 57,188

□ 준공기한 변경(연장)

○ 준공기한 연장 : 당초 ’23. 6. 11. → 변경 ’23. 8. 30.(82일 연장)

○ 연장 사유

- 본 공사는 레미콘 타설 등 사전 기초공정이 필요하나 콘크리트 안전강도를 고려 등 동절기 공사 중지(’22. 12월 ~ ’23. 2월)

- 아울러 레미콘 파동으로 적기에 납품이 되지 않아 지연되는 등 전반적으로 준공기간 연장 필요

3		향후 추진

□ 설계변경 심의 : ’23. 6. 2. ~  6. 5.

○ 추진부서 : 시설관리과

○ 추진내역 : 위원회 심의 후 적용(1억 이상 변경은 외부위원 선정)

※ 관련근거 : 『행정절차 간소화를 위한 설계변경 자문위원회 운영개선 계획』한강사업본부 시설관리과-4730(‘21.08.12. 방침)

□ 변경계약 의뢰 : ’23. 06. 07.

□ 변경계약 체결 : ’23. 06. 08.

□ 공사 준공 등  : ’23. 08. 31.

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서   1부.  끝.