하나되는 중구, 함께하는 중구
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행【2023년 보도유지보수공사(연가단가)】

우리 부서에서 시행중인『2023년 보도유지보수공사(연간단가)』에 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 보도유지보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2023. 3. 17. ~ 2023. 12. 31.

3. 계약금액 : 금958,073,210원

4. 계 약 자 : (주)홍익이엔씨 대표 이영임

5. 공사규모 : 보도정비 70a, 경계석 및 측구 정비 500m 등

6. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감		사유
총공사비	1,458,707,210	2,053,927,510	증)	595,220,300	신규공종 및 시공물량 증․감
도급비	958,073,210	1,477,542,210	증)	519,469,000
관급비	389,253,000	431,286,330	증)	42,033,330
이전비	111,381,000	145,098,970	증)	33,717,970

7. 설계변경 사유

- 시비 추가 재배정, 관내 주민불편 민원사항 및 노후 보도 정비 물량 증가 등 추가공사 시행에 따른 시공물량 변경(증·감) 사항 발생

8.  예산과목

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예산액(천원)	비고
합 계				2,186,200
도로시설물 관리	도로 및 도로부속물 관리	시도 보도 유지관리	시설비	989,200	시비 (재배정)
		횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비		267,000
도시기반 시설확충	도로유지 관리	보도유지보수공사(연간단가)	시설비	730,000	구비
		평탄성 불량보도 및 보도턱 집중정비		200,000

붙 임  1) 설계변경 검토보고 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 제비율 검증확인서 1부.

4) 일상감사 및 계약심사 결과 1부.

5) 관련근거 1부.  끝.

주무관							고대수			보도관리팀장					이은주					도로시설과장					어원철				안전건설교통국장						06/04
																																			代김성학
협조자				주무관						박윤정					계약팀장							왕지영					재무과장							양정열
기획재정국장							송인상
시행			도로시설과-14704									(	2023. 6. 4.					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.go.kr
전화		02-3396-6092						/전송			02-3396-8888					/	ds5742@junggu.seoul.kr												/	부분공개(5)