문서번호	기전과-7022
결재일자	2023. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
구영빈		06/05
		代박신범
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고  「서울 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사(신호)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「서울 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사(신호)」

2023. 6. 5.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

서울 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사(신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보

ㅇ 동부도로사업소 기전과-1588호(2022.02.10.) 1지구 1차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-1589호(2022.02.10.) 2지구 2차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-1591호(2022.02.10.) 3지구 1차

□ 원인자부담공사 변경승인 요청

ㅇ ********************************* 1지구

ㅇ ********************************* 2지구

ㅇ ********************************* 3지구

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 서울 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사  (1, 2, 3지구)

□ 공사위치 : 강동구 강일동 132-12 일대

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	********	******	********	********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************

□ 변경사유 : 토목공사 지연으로 인한 준공기한 연기

Ⅳ		검토 의견

□ 현장 확인 및 변경승인 서류를 검토한 결과 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 각 1부.

2. 감리사 서류 1부.

3. 설계내역서 각 1부.

4. 설계도면(별첨) 1부.  끝.