문서번호	인재기획과-6347
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
이명희		최진경	06/07
			김규룡
협조

2023년 인재개발원 산사태정비공사  실정보고(3차)

2023. 6.

서울시인재개발원

(인 재 기 획 과)

2023년 인재개발원 산사태정비공사 실정보고(3차)

집중호우로 유실·파손된 인재개발원내 임야 및 사방시설을 정비코자 시행중인『2023년 인재개발원 산사태정비공사』 추진중 현장여건 등에 따라 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 2023년 인재개발원 산사태정비공사

❍ 공사기간 : 2022. 3. 16 ~ 6. 13(90일간)

❍ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 산36-6번지 일대(우면산)

❍ 공사내용 : 사방댐 및 골막이, 바닥막이, 기슭맑이 등 사방시설 설치

❍ 총공사비 : 371,527천원

(도급비 : 302,857천원, 관급비 : 61,070천원, 시공감리 7,600천원)

❍ 도급업체 : 주식회사 로안포레스트 대표 김승진(송파구 송파대로28길 24)

❍ 시공감리 업체 : 주식회사 백림FR 대표 송동근(경기도 광주시 행정타운로 69번길 18)

❍ 공 정 률 : 약 80%

Ⅱ

실정 및 설계변경계획

구분	실정사항	설계변경	비 고
시설물	사방댐 큰돌 찰쌓기 및 붙임시공	○ 사방댐 큰돌 찰쌓기 및 붙임 ▸큰돌찰쌓기: 0 → 68.1㎡ ▸큰돌찰붙임: 0 → 32㎡	적합
	시공지 현황에 따른 사방 시설물 추가시공 필요	○기슭막이 연장 및 낮은바닥막이 추가 ▸기슭막이 : 350.5 → 391.3㎡ ▸낮은바닥막이(H1.2,B2) : 3 → 5개소	적합
시설물	기존(견치석)배수로 존치구간 경사도 및 향후 관리 등을 고려 시공법 변경	○ 기존배수로 깬돌바닥찰붙임 제외 시설보완용 깬돌바닥대공 추가시공 ▸깬돌바닥찰붙임 : 78→ 0㎡ ▸깬돌바닥대공(H0.5,B2) : 3 → 9개소 ▸깬돌바닥대공 기초 및 천단	적합
	향후 사방시설 관리용 작업로 확보로 인한 우배수 시설변경	○ 작업로 확보를 위해 우배수용 호형수로 위치 및 시공물량 감소 대체 맹암거 및 집수정 추가설치 ▸호형수로(깬돌 B=1) : 49 → 20m ▸맹암거(D300): 0 → 28m ▸집수정(1m*1m*1m): 1 → 3개소	적합
	배수로 집수부 기존옹벽 개선용 목재붙임	○ 옹벽 목재붙임 ▸목재붙임(합성목재) : 0 → 1식	적합
	배수로 하부 데크로드내 임시 철거 목교 노후로 재설치 불가	○ 데크로드 계단 및 목교 신설 ▸목교((W3*L5,난간,H빔) : 0 → 1EA ▸데크계단((W32*L3*H1.5): 0 → 1식	적합
	존치 견치석배수로 현황 콘크리트 뒷채움으로 물빼기구멍(천공) 시공불가	○ 물빼기구멍 시공제외 ▸물빼기구멍(천공): 1 → 0식	적합
	작업로 진입구간거리 미반영	○ 작업로 개설 및 복구 거리연장 ▸작업로 개설 및 복구 200 → 300m	적합
	기존 깬돌 재사용으로 구조물별 소운반거리 변경	○ 소운반연장거리 반영 ▸큰돌바닥막이(상6.0) 1 → 1개소 ▸큰돌바닥막이(상8.0) 1 → 1개소 ▸큰돌찰쌓기 1.5 → 1.5㎡ ▸돌망태누구막이 2 → 2개소 ▸깬돌기슭막이 4.8 → 4.8㎡	적합
식재	사방시설 관리용 확보 작업로 주변 사면녹화 면적 증가	○ 초류종자줄파종 추가시공 ▸파종 : 48 → 200㎡	적합
철거	견치석배수로 철거 폐크리트 발생량 증가	○ 폐콘크리트 처리량 반영 ▸폐기물 운반 56.76 → 42.45㎥ ▸페콘크리트 처리: 56.76 → 92.761ton	적합
철거	기슭막이 철거 면적 증가	○ 구조물헐기 변경물량 반영 ▸구조물헐기 78.36 → 92.7613㎥	적합
	목교철거 및 데크재설치 목교존치로 인한 철거 제외 데크노후화로 인한 재설치 불가 작업로개설로 인한 데크철거 로프휀스 우회하여 작업으로 인해 철거 및 재설치 제외	○ 데크철거 등 변경물량 반영 ▸목교철거 1 → 0개소 ▸데크재설치 1 → 0식 ▸데크철거 0 → 2식 ▸로프철거 후 재설치 4경간 → 0경간	적합
관급자재	공정별 추진일정에 따른 관급자재 적정공급 어려움 ※ 사방시설 우기전 준공필요	○ 시공대상 품질확보 범위네 공급원할 조경석 규격등 재선정 조달구매 ▸ 조경석(sr1605 600*800*900 R15~30) 798.7ton 조경석(sr1605 600*800*900 R15~30)18.36ton → 조경석(sr1605 600*800*900 R15~30) 879.56ton ○ 수시소요되는 관급 레미콘 물량조정 현장 비빔타설 ▸관급레미콘(25-24-12) : 117.11 → 104.04㎥ 관급레미콘(25-21-12) : 46.5 → 0㎥ 관급레미콘현장운반 114.82 -> 102㎥ ▸현장비빔타설 : 0 → 58.54㎥	적합 ※중간 감리 보고 (2,5차)
수목 제거	사방실설 주변 임야사면 위험수목 증가	○ 지장 및 위험 수목제거 ▸위험수목 제거 6 -> 24주	적합

※ 상기내용은 시공 시 현장상황에 따른 물량 등 일부 경미한 변경사항이 발생 될 수 있으며,     설계변경 시 반영하되 설계변경 범위는 본 사업의 예산범위(집행잔액 및 낙찰액 포함) 임

Ⅲ

설계변경 방법 및 예산

❍ 설계변경방법 : 시공 전에 완료해야 하나, 교육과정 운영상 소음 발생                      최소화 및 우기전 공사 완공이 필요하여 우선 시공하고                      추후 설계변경 시행코자 함

❍ 예산과목 : 인재개발원 인재기획과, 산림안전관리, 산림재해방지,

사방시설 조성(국비), 시설비 및 부대비, 시설비(재배정)

붙임 : 2023년 인재개발원 산사태 정비공사 실정보고 검토보고서(1차) 1부.  끝.