문서번호	치수과-8916
결재일자	2023. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제281호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장		부구청장
우세민		문철		민병기		신용철		06/07
								유보화
협조
	기획재정국장		문성수
	재무과장		김영규
	계약팀장		황미란

「2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(단가계약)」 설계변경(1차) 추진 계획

「2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(단가계약)」

설계변경(1차) 추진 계획

2023. 6.

[안전건설교통국 치수과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√] ( 서울시 재난관리기금 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(연간단가)」

설계변경(1차) 검토보고

반지하주택 전수조사에 따라 침수방지시설 설치 수요 증가로 인한 추가 예산이 편성됨에 따라, 이를 설계에 반영하여 주민불편사항 및 재해예방에 만전을 기하고자 함

□ 사업 개요

○ 공 사 명: 2023년 지하주택 등 침수방지시설 설치공사(연간단가)

○ 기    간: 2023.03.08. ~ 2023.12.30.

○ 공사개요: 역류방지기 설치 700개, 차수판 설치 500m

○ 계 약 자: ㈜자이언  대표 최종식

○ 계약금액: 금536,208,000원

□ 설계변경 내용

○ 추가예산및 낙찰차액 반영[안전관리과-8106호(2023.5.12.), 치수안전과-9078호(2023.5.9.)]

- 증가하는 수요에 대응하기 위한 낙찰차액 및 추가예산 반영

(총 예산: 구 재난관리기금 700, 시 재난관리기금 600, 낙찰차액 64 백만원)

○ 기술지도용역비 계상[치수과-2778호(2023.2.22.)]

-「산업안전보건법 시행령」제59조 기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결시기

○ 품질시험비 계상[감사담당관-4388호(2023.5.23.)]

-「건설기술진흥법」제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행) 및 동법 시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용기준)

○ 공사비 증·감내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비	536,208,000	1,300,000,000	증) 763,792,000
공급가액	487,461,818	1,179,208,545	증) 691,746,727
부가가치세	48,746,182	117,920,855	증) 69,174,673
도 급 비	536,208,000	1,297,129,400	증) 760,921,400
이 전 비	0	2,870,600	증) 2,870,600

○ 주요 물량 증·감

공 종		단위	수 량				비 고
			당 초	변 경	증 · 감
배 수 공	역지변 설치(D50~100mm)	개소	1,000	593	감	407
	역지변 설치(세면,씽크대용 등)	개소	570	320	감	250
시설물공	차수판 제작	m	250	2,000	증	1,750
	차수판 지주 설치	개소	300	2,400	증	2,100

□ 조치 계획

○ 상기 내용과 같이 물량 증·감 등에 대하여 설계변경 시행 및 변경계약을 체결하며, 향후 공사완료 후 실물량을 반영하여 정산 처리하고자 함

붙임  1. 설계변경내역서(1차) 및 제비율 검증확인서 각 1부.

2. 예산 추가편성 방침서(치수과, 주택정책과) 각 1부.

3. 구 재난관리기금(3회) 예산 배정 공문 및 심의의결서 1부.

4. 시 재난관리기금(6차) 예산 배정 공문 및 심의결과 1부.

5. 일상감사 의견서 1부.  끝.