문서번호	시설보수과-4828
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	06/08
			이경우
협조

『2023년 오류철도고가차도보수공사』 발주계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 06

강서도로사업소

[시설보수과]

『2023년오류철도고가차도보수공사』

발주계획 검토 보고

2023년도 본예산 사업으로 추진 예정인『2023년 오류철도고가차도보수공사』에 대한 발주계획 검토 보고 임

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 2023년 오류철도고가차도보수공사

□ 위    치 : 구로구 오류동 74-4 ~ 331-3

□ 사업개요 : 강재도장 1,360㎡

□ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2023.12.31

□ 사 업 비 : 750백만원

※ 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 오류철도고가차도보수공사,

시설비및 부대비, 시설비

Ⅱ		그간 추진사항

□ 추진사항

○ 2020.04.06.~10.30 : 정밀안전점검용역 --- (종합평가 : B등급)

- 공용성 확보등 내구성 향상을 위한 선제적 보수공사 시행

○ 2021년 오류철도고가차도보수공사(1,850백만원) -- 강재도장 1,820㎡

○ 2022년 오류철도고가차도보수공사(1,900백만원) -- 강재도장 3,176㎡

○ 2022.12.14 : 공법선정위원회 개최 계획

○ 2022.12.16 : 공법선정위원회 개최결과 보고

- 공법명 : SM-SPM법(특허 제10********호)

○ 2023.05.31 : 계약심사 의뢰

○ 2022.06.05 : 계약심사 통보                       (단위:천원)

예산액	심사요청액	심사금액	조정액	조정률
750,000	732,347	705,780	26,567	3.63%

Ⅲ		추진계획

□  총 공사비 : 723,433천원

○ 도급비 705,780천원, 관급비 0천원, 이전비 17,653천원

□  발주방법

○ 일반경쟁(지역) : 추정가격 10억미만 전문공사

※ 행정안전부 예규·고시 제89호(2019.10.8.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장(제한입찰 운영요령)

□  입찰참가자격

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 구비하고, 입찰참가 등록마감일 기준「건설산업기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업 또는 도장·습식·방수·석공사업(주력:도장공사), 구조물해제·비계공사업을 모두 등록한 업체

○ 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체.

Ⅳ		향후계획

□ 2023. 6. 8 : 공사발주 및 입찰공고

□ 2023. 7월 : 계약 및 착공

□ 2023. 7. ~ 12월  : 공사시행 및 준공

따로붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.