문서번호	조경과-5222
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
성종화		김흔진	06/08
			구동근
협조

서울대공원 테마가든 리뉴얼

공사(4단계) 준공기한 연기 검토

2023. 6.

서 울 대 공 원

(조경과)

『서울대공원 테마가든 리뉴얼공사(4단계)』

준공기한 연기 검토

「서울대공원 테마가든 리뉴얼공사(4단계)」시행 중 장미축제로 인한 관람객 증가로 안전사고 예방을 위한 공정지연으로 준공기한을 연기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 테마가든 리뉴얼공사(4단계)

○ 공사내용 : 저수지 주변 산책로 정비 및 기존 노후시설 정비 등

○ 기    간 : 2023. 4. 12. ~ 6. 10.

○ 사 업 비 : ***************************************************

○ 도급업체 : ***************

□ 준공기한 연기 검코

○ 장미 축제로 관람객이 증가함에 안전사고 우려가 있어 일부구간 작업중단 및 지연으로 예상일보다 늦어져 계약기간 내 준공이 어려움.

○ 공사내용과 시기등을 전반적으로 고려할 때 준깅기한을 연기함이 합당하고고 판단 됨.

(당초) 2023. 6. 10. → (변경) 2023. 6. 27.

□ 조치계획

○ 지체상금 부과 없이 준공기한 연기 변경계약 요청 후 공사를 마무리 하고자 함.

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 계약기간 변경 요청서 1부.  끝.