문서번호	문화재관리과-7825
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	한양도성관리팀장	문화재관리과장		문화본부장
나대현	윤용훈	김홍진		06/08
				최경주
협 조

공사 일시정지 검토보고(북한산성 보국문대동문 해체보수공사)

공사 일시정지 검토 보고

(북한산성 보국문·대동문 해체보수 공사)

2023. 6.

문  화  본  부

(문화재관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

공사 일시정지 검토보고

(북한산성 보국문·대동문 해체보수공사)

북한산성 보국문·대동문 해체보수공사와 관련하여 자문의견 반영에 따른 설계변경및 문화재청 설계승인 등으로 공사를 일시정지 하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 북한산성 보국문·대동문 해체보수공사

□ 위    치

- 보국문 : 성북구 정릉동 산1-1

- 대동문 : 강북구 수유동 산127-1

□ 계약개요

- 계 약 자 : ********************

- 계약금액 : *********************************

- 공사기간 : *********************

□ 공사내용

□ 추진경위

- 2021. 11.30.    설계용역 준공

- 2022. 04.28.     공사계약

- 2022. 05.23.     문화재 수리 착공

Ⅱ		공사 일시정지 검토 내용

□ 관련근거

-「지방자치단체 공사계약 일반조건」제8절 6. 공사의 일시정지

- 북한산성 대동문보국문 해체보수공사 공사중지 요청건

(이상 20*******01호)

□ 공사 일시정지 사유

***************************************************************************

	********************
****************** *********************************** **************************** ****************** ***********************

□ 공사 일시정지 기간

***************************************

Ⅲ		감리자 검토 의견

□ *****************************************************************************

Ⅳ		처리의견

□ **********************************************************************************

□ ***********************************************

붙  임 : ****************************  끝.