문서번호	치수안전과-10688
결재일자	2023. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수총괄팀장	치수안전과장
조중환		김지환	06/08
			최연호
협 조

- 서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역 -

준공기한 연기 보고

2023. 6.

물순환안전국

(치수안전과)

- 서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역 -

준공기한 연기 보고

『서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역』준공기한 연기에 따른 검토 보고임.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역

○ 용역기간 : 2022. 6. 15. ~ 2023. 6. 14. (착수일로부터 1년)

○ 용 역 사 : ㈜유신, ㈜선진엔지니어링건축사사무소

○ 용 역 비 : 금263,400,000원

○ 과업내용

- 방재성능 초과강우 기준 수립 및 대응계획 수립방안 제시

- 방재성능 초과강우 대응 매뉴얼 가이드라인 및 홍보방안 제시

- 시범지역(강남역일대 등) 대응계획 수립 등

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’22.  6. : 용역 착수

○ ’22.  8. : 착수보고

○ ’22. 12. : 서울시 방재성능목표 상향 공표

○ ’23. 1. ~ 5. : 기후변화 시나리오 분석, 국내외 이상폭우 피해사례 및 대책 조사, 국외(일본) 재난대응 및 시민대피·사례 조사 등

○ ’23. 6. 9.(예정) : 워킹그룹(외부전문가 3인) 회의

- 참석 : LIG시스템 재난안전연구소(김덕길 박사), 서울기술연구원(윤선권 박사, 김수진 박사)

- 내용 : 방재성능목표 상향, 새로운 수방대책, 해외 사례 등을 고려하여 방재성능 초과 강우 대응계획 수립방안 논의

Ⅲ		준공기한 연기

○ 준공기한 연기내역

- 당초 : 2022. 6. 15. ~ 2023. 6. 14.

- 변경 : 2022. 6. 15. ~ 2023. 9. 30.

○ 준공기한 연기사유 : 아래 사항 반영을 위해 과업기간 추가 필요

- 2022년 12월 상향된 서울시 방재성능목표를 반영하여 방재성능 초과강우 기준 마련 및 대응계획(비상발령, 상황관리, 시민대피 등) 수립지침 제시 필요

- 대응계획 수립을 위해 재해지도의 활용이 필수적이나 재해지도(침수흔적도, 대피계획도) 작성이 2023년 3월 완료됨에 따라 과업기간 추가 필요

- 금년 발표한 침수 예경보제, 동행파트너, 침수예측 정보시스템 등 수방대책의 내용을 반영하여 활용도 향상 필요

○ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		향 후 계 획

○ ’23. 6. ~ 8. : 워킹그룹 토의 및 중간보고

○ ’23. 9. : 최종보고 및 용역 준공

붙임 : 준공기한 연기 요청 공문 및 합의각서 등 각 1부.  끝.