아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	난지 테마관광 숲길 조성 공사 관급자재 조달구매 납품기한 연기 요청

1. 환경녹지과-2381호(2023. 4. 18.)와 관련입니다.

2. 난지 테마관광 숲길 조성공사 관급자재 조달구매 건에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품요구번호: ****************

나. 계   약   자: ***************

다. 납품연기 기한 요청 물품내역

*

라. 납품기한 연기: (당초) 2023. 5. 20. → (변경) 2023. 6. 30.

마. 납품기한 연기 사유: ******************************

바. 귀책소재: 서울특별시 서부공원여가센터(지연배상금 미부과).  끝.

	환 경 녹 지 과 장
주무관	진덕성		녹지관리팀장	윤희권		환경녹지과장	06/09
강병기
협조자
시행	환경녹지과-3660	(	2023. 6. 9.	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60, (성산동) (성산동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-5561	/전송	02-300-5569	/	dschin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)