문서번호	재난관리과-3949
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
반장	구조팀장	재난관리과장		소방서장
이대명	정민석	代전영선		06/09
				윤영재
협 조
	반장		구휘모

다목적 인명구조 훈련장 설치공사 발주 계획

2023. 6.

구로소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

다목적 인명구조 훈련장 설치공사 발주 계획

재난현장에서의 인명구조 전문가 양성 및 복합적인 재난사고 등에   위기대응 역량 강화를 위한 다목적 인명구조 훈련장 설치공사 발주 계획임

1		관련 근거

○ 「119구조·구급에 관한 법률」제25조(구조대원의 전문성 강화 등)

○  기술심사담당관-2008(2023.2.1.)호 「제166차 기술용역 타당성심사결과 통보」

○ 재난관리과-957(2023.02.09.)호 「다목적 인명구조 훈련장 설치 설계 계획」

○ 구로구청 건축과-13702(2023.06.05.)호 「공용건축물(구로소방서) 협의 처리 통보」

2		추진 목표

○ 다목적 인명구조 훈련장 조성을 통한 상시 소방전술훈련 강화

○ 실제 상황을 가장한 유형별 교육훈련으로 위기상황 대처능력 제고

○ 체계적 교육훈련 실시로 전문구조대원 양성·구조서비스 품질 향상

3		공사 개요

○ 사 업 명: 구로소방서 다목적 인명구조 훈련장 설치

○ 사업내용: 구로소방서 본서 주차장 부지 다목적 인명구조훈련장 별동증축

※ 총 4층 구조 (지상1층 필로티 구조로 지상 2~4층 연면적 146㎡의 훈련장)

○ 추진기간: 2023. 2월 ~ 11월

○ 배정예산(총예산)

(단위: 천원)

구분	총예산	시설비	감리비	부대비
계	*******	*******	*****	*****

※시설비 중 설계용역비(*********) 예산 집행 완료

다목적 인명구조 훈련장 예상도

4		설계용역 결과

□  설계용역 세부내용

○ 계약기간: 2023. 2. 10. ~ 5. 10.

구분	내용	비고
건명	다목적 인명구조훈련장 증축공사
면적	146.91㎡ / 높이: 14.5m
구조	총 4층 건물(철골조)	1층 필로티 2층 화재진압 훈련 3층 인명구조 훈련 4층 로프악세스 훈련
주차대수(소방서)	기존 28대 → 24대 / 4대 감소

※설계도면 수정 및 건축 인허가 등으로 30일 기간 연장

○ 다목적 훈련장 내부 시설 설계 관련 자체 T/F팀 검토회의 3회 진행

- 현장활동대원 의견 설계 적극 반영(03.16, 04.10, 04.25)

○ 설계도서(건축,구조,전기,소방,통신) 수령 후 내역 확인

5		공사 세부계획

□ 다목적 인명구조 훈련장 시설공사

○ 기    간: 계약일로부터 120일 이내

○ 기초예산: *****************************

○ 계약방법: 제한경쟁입찰

○ 계약대행: 서울시 재무과(2억원 이상 사업)

○ 관련법령: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 10조

○ 공사규모: 다목적 훈련장 약 146㎡의 화재진압 및 구조전문 훈련장 등

○ 예산과목: 소방안전특별회계 / 구조장비 보강 및 유지관리 / 시설비

※다목적 인명구조 훈련장 설치 관련 장애인 편의시설 등은 공사 후 집행잔액 활용 및 서울소방재난본부 소방행정과 조직경영팀과 협의 후 예산 재배정 추진 예정

□ 다목적 인명구조 훈련장 전기공사

○ 기    간: 시설공사와 동일

○ 기초예산: **************************

※추후 시장가격 조사 후 수의시담 관련 금액 하향 조정 가능

○ 계약방법: 전자수의시담(1인) (지방계약법 제9조 및 같은법 시행령 제25조)

○ 수의계약 사유: 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하 공사계약으로        여성기업, 장애인기업과의 수의계약

○ 관련법령: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

○ 예산과목: 소방안전특별회계 / 구조장비 보강 및 유지관리 / 시설비

□ 다목적 인명구조 훈련장 기계소방공사

○ 기    간: 시설공사와 동일

○ 기초예산: ***********************

※추후 시장가격 조사 후 수의시담 관련 금액 하향 조정 가능

○ 계약방법: 전자수의시담(1인) (지방계약법 제9조 및 같은법 시행령 제25조)

○ 수의계약 사유: 추정가격 2천만원 이하 물품, 공사, 용역일 경우

○ 관련법령: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

○ 예산과목: 소방안전특별회계 / 구조장비 보강 및 유지관리 / 시설비

□ 다목적 인명구조 훈련장 감리용역

○ 기    간: 시설공사와 동일

○ 기초예산: ******************

○ 계약방법: 전자수의시담(1인) (지방계약법 제9조 및 같은법 시행령 제25조)

○ 수의계약 사유: 추정가격 2천만원 이하 물품, 공사, 용역일 경우

○ 관련법령: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

○ 예산과목: 소방안전특별회계 / 구조장비 보강 및 유지관리 / 감리비

제한경쟁입찰

6월~7월

공사발주 및 계약

착공 및 준공(4개월)

7월~11월

건축(감리·전기·소방 별도)

설계용역

‘23.2월~5월

설계도면 작성(T/F팀 협조)

완료

6		향후 계획

끝.