문서번호	기전과-7243
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
진수경		06/09
		代이영일
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「영동대로 지하공간 복합개발 (4공구)주변 교통안전시설물(표지) 설치공사」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「영동대로 지하공간 복합개발(4공구) 주변

교통안전시설물(표지) 설치공사」

2023. 6. 9.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

영동대로 지하공간 복합개발(4공구) 주변 교통안전시설물(표지) 설치공사 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 교통안전시설물(표지,노면표시) 원인자부담 설치공사 변경사항 알림
[영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사(토목)]

ㅇ *************************************호

□ 교통안전표지 원인자부담공사 승인 통보「영동대로 지하공간
복합개발(4공구)주변 교통안전시설물(표지) 설치공사」

ㅇ 동부도로사업소 기전과-8057(2021.7.21.)호

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발(4공구)주변 교통안전시설물(표지) 설치공사

□ 공사위치 : 강남구 삼성동 172-66 일대

□ 공사기간 : ****************

□ 원인자 및 업체현황

구분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
표지	******** ***********	********	********	******

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	****************	*****************
감 리 사	********	******
시 공 사	******	******

□ 변경사유

o 선행공정(토목공사) 진행 중 계획변경으로 인한 공기연장

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.

3. 공사담당자현황 1부.  끝.