문서번호	설비부-8519
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이정훈		배수웅	06/09
			代장병선
협조

[동북권 아동청소년예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사]실정보고 검토보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(설비부)

『동북권 아동청소년예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사』

실정보고(조명기구 취부형태 변경) 검토보고

『동북권 아동청소년예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고(조명기구 취부 형태 변경에 따른 물량변경) 건에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 사 업 명: 동북권 아동년청소년예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사

ㅇ 위    치: 서울특별시 강북구 미아동 811-2

ㅇ 시 공 사: *****************

ㅇ 감 리 단: *****************

ㅇ 계약현황

차수	계약금액(원)	계약기간	비고
총차	*************	***********************
1차	***********	***********************	**
2차	*************	***********************

□ 관련근거

ㅇ 전기공사 실정보고(실정보고)에 대한 검토보고(동북권CM 23-179, 2023.05.24.)

ㅇ 실정보고 검토알림(강북구 건축과-21325, 2023.06.08.)

□ 검토내용

ㅇ 실정보고 사유

- 천정마감 없어짐에 따라 등기구 취부 형태 변경(직부 -> 레이스웨이)

ㅇ 주요 물량 변경내용 (붙임 참조)

ㅇ 도급비 변경내용

<구역별 2차수 도급비 변경내용>

구분 (2차수)	금 액 (원)			비 고
	당초	변경	증·감
서울시	***********	***********	*************
강북구	***********	***********	************

<총 도급비 변경내용>

구분	금 액 (원)			비 고
	당초	변경	증·감
총차	*************	*************	*************
2차	*************	*************	*************

□ 감리단 검토의견

ㅇ 상기와 같이 전기공사(총차, 2차수) 실정보고 내용을 검토한 결과 적정하다고 판단됨

□ 보고자 검토의견

ㅇ 건설사업관리기술단이 제출한 실정보고 내용이 적정하다고 사료되어 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임: 1. 감리단 요청 공문 1부.
2. 강북구 공문 1부.

3. 주요변경 내용 1부.  끝.