문서번호	시설보수과-4932
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	06/12
			이경우
협 조

『2022년 오류철도 고가차도 보수공사』 “현장실정보고(4회)에 따른 검토결과 보고”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

『2022년 오류철도 고가차도 보수공사』

“현장 실정보고(제4회)에 따른 검토결과 보고”

2022년 본예산 사업으로 추진 중인『2022년 오류철도 고가차도 보수공사』와 관련 감독위탁 기관으로부터 제출된 "현장 실정보고(제4회)" 검토결과 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 2022년 오류철도 고가차도 보수공사

□ 공사기간 : 2022. 8. 05 ~ 2022. 12. 31

□ 사 업 비 : 1,900백만원 (도급비 : 1,669,523,810원)

□ 공사개요 : 강교도장 3,176㎡, 표면보수 174.3㎡, 단면복구 63.8㎡

□ 도 급 자 : 극동에이엔씨(주) 대표 박종식

□ 공 정 율 : 85%

Ⅱ		보 고 내 용

□ 관련근거

○ 현장 실정 검토보고서(제4회) 제출

- 표면보수 추가작업 시행 (A=699.8m²)

※ 시설보수과-4644호(2023.6.1)

※ 서울시설공단 공사감독1처-2656호(2023.6.8)

□ 실정보고 내용 (세부내용 #붙임)

○ 교대(A1) 벽체 표면오염등 백태 표면보수 시행

- 오류철도 고가차도 보수공사 추진 중 예비준공검사(5.31) 결과 공용기간    경과에 따른 교대(A1) 벽체 콘크리트 표면오염(누수흔적, 백태)이 심화되어 있어

시설물의 효율적 유지관리를 위한 선제적 표면보수 작업이 필요한 실정임.

<현황사진>

교대부(A1) 벽체 전경	교대(A1) 벽체 표면오염 및 백태

□ 검토의견

○ 상기와 같이 구조물 교대(A1) 벽체 콘크리트의 다수 표면오염(백태, 누수흔적)           부분에 대해 적기에 표면보수를 시행함으로써 콘크리트 열화방지 및 내구성 증진에

기여코자 함.

Ⅲ		검 토 결 과

□ 상기 현장실정보고(제4회) 내용에 대하여 선작업 추진코자 하며, 공사비          변경(증·감) 부분에 대해서는 추후 설계변경시 정산 조치코자 함.

▶ 개략 공사비 : (감) 27,100천원(제경비 포함)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 2023. 06. 12 : 감독기관 통보(승인)

□ 2023. 06월 : 잔여공종 추진

□ 2023. 06. 30 : 설계변경 및 준공

따로붙임  관련문서(공사실정보고서 등) 1부.  끝.