서울의 중심, 청렴의 중심 종로
	종 로 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회)시행 - 옥인동 정비기반시설 조성공사(소로3-1,골목길)

우리구에서 시행 중인 「옥인동 정비기반시설 조성공사(소로3-1, 골목길)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 옥인동 정비기반시설 조성공사(소로3-1, 골목길)

2. 도 급 자: 백산토건주식회사 대표 공형섭

3. 공사기간: 2022. 08. 04. ~ 2023. 06. 30.

4. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도 급 비	449,298,800	690,266,000	증) 240,967,200
공 급 가 액	408,453,455	627,514,546
부가가치세	40,845,345	62,751,454

- 설계변경 사유 : 현장여건 상이 및 민원 등에 따른 우리구 요청에 따른 시공물량 증·감 등

5. 예산과목 : 주택관리과,평생살고싶은마을만들기추진,주거지재생사업추진,    옥인동역사문화형주거환경개선사업,시설비및부대비,시설비(시비)

붙임 : 1. 실정보고 검토보고 1부.

2. 계약심사(일상감사) 결과 1부.

3. 설계변경 내역서(심사본) 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.

5. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김두수		주거환경개선팀장	임은정		주택관리과장	배호진		미래도시국장	이정식
부구청장	06/12
마채숙
협조자	주무관	장혜민		계약팀장	조양희		재무과장	김한라
행정국장	권기욱
시행	주택관리과-22999	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	03152	서울 종로구 종로1길 36	/	https://www.jongno.go.kr
전화	02-2148-2612	/전송	02-2148-5827	/	dusu@seoul.go.kr	/	대시민공개