아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역)

1. 치수안전과-10688호(2023.6.8.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인「서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역

나. 용역기간 : 2022. 6. 15. ~ 2023. 6. 14.

다. 계 약 자 : ㈜유신, ㈜선진엔지니어링건축사사무소

라. 계약금액 : 금263,400,000원

마. 준공기한 연기내역

- (당초) 2022. 6. 15. ~ 2023. 6. 14.

- (변경) 2022. 6. 15. ~ 2023. 9. 30.

바. 예산과목 : 물순환안전국 치수안전과, 치수 및 하천 관리, 수방대책 사업(일반회계), 서울시 방재성능 초과 강우 대비 대응체계 수립용역, 시설비

붙 임  1. 공문 및 합의각서 각 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 준공기한 연기 요청 방침 1부.  끝.

	치 수 안 전 과 장
주무관	조중환		치수총괄팀장	김지환		치수안전과장	06/12
최연호
협조자	계약1팀장	원종순
시행	치수안전과-10848	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 8층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3864	/전송	02-2133-1044	/	skkujo86@seoul.go.kr	/	부분공개(5)