아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	공사변경계약 체결보고 및 통보[2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)]

1. 정수시설과-2548(2023.6.8.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 시행중인 『2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)』 변경 계약을 체결하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 공 사 명 : 2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)

나. 계약업체 : 기준건설디앤씨주식회사  대표 한동준

다. 변경사유 : 신규공종 발생 및 물량 증·감, 제경비 정산 등

라. 변경내용

구분		공사비(원)
		당초	변경	증·감
총계약금액		395,110,000	436,480,000	증)41,370,000
1차년도 계약금액		385,110,000	385,110,000	0
2차년도 계약금액		10,000,000	51,370,000	증)41,370,000
도급비	공급가액	359,190,909	396,800,000	증)37,609,091
	부가가치세	35,919,091	39,680,000	증)3,760,909
	계	395,110,000	436,480,000	증)41,370,000

마. 변경계약일자 : 2023.06.12.

붙임 : 공사변경계약서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	신희진		행정관리팀장	김경화		광암아리수정수센터소장	06/12
강승곤
협조자
시행	행정관리팀-6857	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 (광암동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5316	/전송	02-3146-5309	/	hj2050@seoul.go.kr	/	부분공개(5)