아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)문창 대표 김명철 귀하
(경유)
제목	계약이행 지체 경고 (한강스카이워크 설치 타당성 조사 용역)

1. 생태환경과-3322(2023.6.8.)호, 계약번호(20232200FD5-00) 관련입니다.

2. 귀사와 계약체결하여 시행 중인『한강스카이워크 설치 타당성 조사 용역』이행 지체로 다음과 같이 엄중 경고(1차)합니다.

3. 아울러 지체된 공정의 만회계획과 기 요구한 자료제출건에 대하여 2023.6.14.(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 과업지체 경고(1차)

- 계약이행의 지체 : 보고회 미개최, 과업수행계획서상 과업 지연

- 업무지시 미이행 : 자료 미제출

※ 정당한 이유없이 이행촉구에 따르지 아니한 경우(계약일반조건 제9-8-3절)

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	양지정		생태환경과장	이종혁		공원부장	06/12
김상국
협조자
시행	생태환경과-3369	(	2023. 6. 12.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0631	/전송	02-3780-0745	/	jjyang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)