아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경 고시 시행

도로계획과-6683호('23.5.18)와 관련하여 서울특별시고시 제2020-270호('20.6.25.)로 실시계획 고시, 서울특별시고시 제2020-405호('20.10.5.)로 실시계획 변경 고시되고 사업기간 연장을 위해 서울특별시공고 제2023-1525호(2023.05.25.)로 실시계획 변경에 대해 열람공고한“장기미집행도로(서초대로) 보상사업”에 대하여,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조, 같은법 시행령 제97조에 따라 도시계획시설 도로 실시계획(변경)을 작성하고 같은 법 제91조 및 같은법 시행령 제100조에 따라 아래와 같이 고시하고자 합니다.

가. 사업의 명칭 : 장기미집행도로(서초대로) 보상사업

나. 실시계획 변경 내용 : 사업기간 연장

- (당초) '20.06.25. ~ '23.06.24 → (변경) '20.06.25. ~ '24.12.30.

- 사유 : 재정 투자계획 변동에 따른 사업기간 연장

다. 열람공고 기간 내 제출의견 : 해당없음

붙임 : 고시문(안) 1부.  끝.

주무관	양지웅		도로정책팀장	代정효진		도로계획과장	06/13
이승석
협조자
시행	도로계획과-7763	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 10층 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8067	/전송	02-2133-0763	/	jwyang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)