문서번호	도로보수과-6027
결재일자	2023. 6. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	서부도로사업소장
정의현	유은중	06/13
		최연우
협 조
	주무관		맹우재
	주무관		김철홍

「상습결빙구간 안전시설 확충사업」

관급자재(결빙방지포장 아스콘) 구매계획 검토 보고

서부도로사업소

(도로보수과)

「상습결빙구간 안전시설 확충사업」

관급자재(결빙방지포장 아스콘) 구매계획 검토 보고

우리사업소에서 시행 예정인 「결빙방지 포장」에 필요한 관급자재[결빙방지 개질아스팔트콘크리트] 구매 계획을 보고 드림.

□ 추진근거

○ 『상습결빙구간 안전시설 확충사업』사업구간 변경 및 추진계획 보고

- 도로보수과-5670(‘23.06.02.)호

□ 사업개요

○ 건    명 : 상습결빙구간 결빙방지 포장공사

○ 예산내역 : **********

- ********************************

○ 정비규모 : 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 71.0a(t=10cm)

연번	노선명 (관할구)	공사구간	공사규모				비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	깊이 (cm)
1	만리재로 (마포구)	공덕동 1-75 ~ 공덕동 108-82	13.0	315.0	40.0	10.0	노후 (2구역)
2	성산로 (마포구)	성산대교 북단 진·출입램프 (강변북로 ⇒ 성산대교)	7.0	225.0	15.0	10.0	포장도로 긴급복구
3	성산로 (마포구)	성산대교 북단 진·출입램프 (성산대교 ⇒ 강변북로)	7.0	240.0	16.0	10.0
합계			27.0	780.0	71.0

○ 추진방법

- 해당공사는 t=10cm 포장으로 결빙방지 아스팔트 콘크리트(표층 5cm)는 별도 구매하고, 일반 아스팔트콘크리트(중층 5cm)는 기 계약된 물품계약에 포함하여 납품받고 추후 설계변경시 반영 추진

- 공사는 노선별 2023년 노후포장도로정비공사(2구역) 및 2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에 포함하여 공사 시행하고 추후 설계변경시 반영 추진

□ 구매계획

○ 건    명 : 결빙방지포장 개질아스콘(WC-6) 구매-서부

○ 납품기간 : 2023.12.31.까지

○ 구매내역

품 명	규 격	수량 (톤)	단가 (원)	소요금액 (원)
***** **********	**************************************************************	***	*******	***********
****				***********

※ 단가(600천원/톤)는 거래가격 적용(’23.06월 호)

- 예산과목 : 안전총괄과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 구매방법 : 제한경쟁입찰(중소기업)

- 입찰참가자격

‣ 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관할 법률 제8조에 의한 중소기업자

‣ 물품분류번호 3011159701(아스팔트콘크리트) 직접생산 확인서 소지 업체

※ 계약심사 대상 : 추정금액 2천만원 이상으로 계약심사 대상

※ 일상감사 제외 : 추정가격 5억원 미만으로 제외

○ 낙찰자 결정방법 : 계약이행능력심사 세부기준 적용

※ 해당물품 납품이행능력-납품실적 심사시 계약목적물과 유사물품으로 평가

□ 향후계획

○ 2023.06월 중 : 계약심사 의뢰

○ 2023.06월 말 : 물품 사전규격공개

○ 2023.07월 초 : 입찰공고 의뢰(서부도로사업소 ⇒ 市-재무과) 및 계약

○ 2023.07월 말 : 선정 시험 실시(서울시 품질시험소)

○ 2023.09월 초 : 공사 시행.

붙임 1. 상습결빙구간 안전시설 확충사업』사업구간 변경 및 추진계획 보고 1부.

2. 특별시방서 1부.  끝.