문서번호	기전과-5763
결재일자	2023. 6. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이건용		채충일	06/13
			차창훈
협 조
	주무관			이정호

설계 변경(2차) 검토 보고

[호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)]

2023. 6. 2.(금)

남부도로사업소

(기 전 과)

호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간) 설계변경(2차) 검토 보고

「호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)」와 관련하여, 제경비 정산 등 설계 변경 내용이 있어 검토하고 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 호암2터널 보행환경 개선 전기공사(서울시 구간)

ㅇ 공사내용 : 보행등 및 환기휀 설치, CCTV 이전 및 추가 설치

ㅇ 공사기간 : 2022. 08. 08. ~ 2023. 06. 30.

ㅇ 계약상대자 : ********************

ㅇ 계약금액 : *************

□ 추진 경위

ㅇ 2022. 07. 13. 공사 시행 및 계약 의뢰

ㅇ 2022. 08. 05. 공사계약 체결

ㅇ 2022. 09. 26. 계약 변경(1차) - 준공기한 연장

ㅇ 2022. 12. 13. 계약 변경(2차) - 계약금액 변경

- 기전과-29041(2022. 12. 8.) 설계변경(1차) 검토 보고

ㅇ 2023. 03. 27. 계약 변경(3차) - 준공기한 연장

□ 설계변경(2차)- 제경비 정산, 물량 변동 없음

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감
*****	***********	***********	***********
*****	*************** *************	*************** *************	*****

- 예산과목 : 남부도로사업소 기전과, 도로시설관리, 터널시설 관리, 호암2터널 보행환경 개선, 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서 : 안전총괄실 도로시설과)

□ 검토 의견

ㅇ 설계 변경 검토 의견

- 상기와 같이 제경비 정산을 시행하고 변경 계약을 의뢰하고자 함

□ 향후 계획

ㅇ 2023. 06. 계약변경 의뢰

ㅇ 2023. 06. 준공 검사 및 준공

붙임 1. 설계변경내역서 1부

2. 검증확인서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.