급수공사 연기 보고서(신설-5, 6, 10, 27)

시    행

급수운영과-9705

시행일자

2023. 6. 13.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
최성현		代김희철	06/13
			代양봉우
협 조

명에 의거 마천동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공　사　명: 2023년 마천동 외 14개동 상수도공사

○ 계약상대자: 주식회사웅진건설산업 대표 유기정

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	*********	신설-5	2022.11.17.~ 2023.05.31.	2022.11.17.~ 2023.07.20.
2	*********	신설-6	2023.04.05.~ 2023.05.31.	2023.04.05.~ 2023.07.31.
3	**************	신설-10	2023.05.04.~ 2023.05.18.	2023.05.04.~ 2023.07.20.
4	**************	신설-27	2023.05.31.~ 2023.06.13.	2023.05.31.~ 2023.07.20.

○ 연기사유

- 연번 1~3: 수요가 측 현장 사정 및 비계 파이프 철거일정으로 인한 공사기간 연기

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기.

끝.