서울의 중심, 청렴의 중심 종로
	종 로 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행[2023년 하수시설물 보수공사(연간단가)]

1. 치수과-16554(2023. 5. 22. 부구청장 방침 제376호)호와 관련입니다.

2. 우리구에서 시행중인「2023년 하수시설물 보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 하수시설물 보수공사(연간단가)

○ 공사위치 : 종로구 관내

○ 공사기간 : 2023. 4. 7. ~ 2023. 12. 30.

○ 공사규모

- 하수관로 개량 : D300~900mm, L=1,160m

- 빗물받이 정비 : 1호(400x500mm)~2호(400x1,000mm), 68개소

- 하수맨홀 정비 : 1호(내경 900mm)~2호(내경 1,200mm), 68개소

○ 도 급 자 : 수봉산업개발(주) 대표 이경호

구 분	금 액 (단위 : 원)
	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	1,558,648,740	2,058,648,740	증) 500,000,000
도 급 비	878,834,740	1,178,834,740	증) 300,000,000
관급자재비	201,299,000	301,299,000	증) 100,000,000
이 설 비	478,515,000	578,515,000	증) 100,000,000

나. 설계변경

○ 변경사유 : 2023년 제1회 추가경정예산 반영

○ 변경내역

○ 예산과목

- (구비) 치수과, 하수·지하수관리, 하천 및 하수도정비, 하수시설물 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비[1,500백만원]

- (시비) 물재생계획과, 자본예산, 상하수도수질, 하수시설관리, 하수관로신설갤량, 감나무골어린이공원 등 2개소 하수관로 개량, 시설비 및 부대비, 시설비[680백만원]

붙임  1.  설계변경 사유서(제1회) 1부.

2.  설계변경 내역서(2023하수시설물보수공사-연간단가) 1부.

3.  검증확인서 1부.

4.  계약심사(일상감사) 의견 통보 1부.

5.  공사 설계변경(제1회) 보고(부구청장 방침) 1부.

주무관	황재혁		하수관리팀장	허광호		치수과장	이일환		건설교통국장	이욱근
부구청장	06/13
마채숙
협조자	주무관	안시성		계약팀장	조양희		재무과장	김한라
행정국장	권기욱
시행	치수과-17567	(	2023. 6. 13.	)	접수		(		)
우	03152	서울 종로구 종로1길 36	/	https://www.jongno.go.kr
전화	02-2148-3232	/전송	02-000-0000	/	jh0423@mail.jongno.go.kr	/	대시민공개