문서번호	기반시설과-4109
결재일자	2023. 6. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
정영환		전결 06/13
		이병철
협 조

- 한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 공사 -

재해예방기술지도 용역 기간 연장(안)

2023. 6.

시설부 기반시설과

한강사업본부

기반시설과

- 한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 공사 -

재해예방기술지도 용역 기간 연장(안)

『한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 공사』의 계약기간 연장에 따라 재해예방 기술지도 용역의 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역개요

용 역 명	계약금액	계약기간	업체명	용역내용
이동형 화장실 부상형 전환 공사 재해예방 기술지도	**********	*****************	*********	********
이동형 화장실 부상형 전환 기반시설공사 재해예방 기술지도	**********			*******

□ 변경 검토

○ 변경 사항 : 계약기간 연장(물량 및 금액 변동 없음)

용 역 명	당 초	변 경	증·감	비 고
이동형 화장실 부상형 전환 공사 재해예방 기술지도	'*********** '********	************ *********	******
이동형 화장실 부상형 전환 기반 시설공사 재해예방 기술지도

○ 변경***

**********************************************************************************

-**********************************

□ 향후 추진

◯ '23. 06. 15.    변경 계약 의뢰(본부 총무과)

◯ ~ '23. 08. 31.  용역 준공

붙임  합의각서 각 1부.  끝.