문서번호	시설보수과-5040
결재일자	2023. 6. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		임형규	06/14
			이경우
협 조

예비준공검사 결과보고

[외발산지하차도 보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 06

강서도로사업소

(시설보수과)

예비준공검사 결과보고

(외발산지하차도 보수공사)

2022년 예산사업으로 시행중인 『외발산지하차도 보수공사』에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

기술심사담당관-10127호(2018.6.29) - - - 예비준공검사 개선대책

시설보수과-4800호(2023.06.08) - - - 예비준공검사 실시계획

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 외발산지하보수공사

시 공 사 : ㈜루아이앤씨  대표 조득선 외1

공사기간 : 2022. 09. 16 ~ 2023. 06. 29

주요공종 : 내오염도장 10,449㎡. 기타 1식

도 급 액 : 금1,795,112천원

감독기관 : 서울시설공단 공사감독1처

추진공정 : 88%

Ⅲ		예비준공검사 결과

검사일 : 2023. 6. 12(월) 15:30

검사자 : 시설보수과 시설6급 강연홍, 시설6급 김승진

검사내용

○ 계약공종 전반에 대한 주요 시공상태 등 검사

○ 내오염도장(하도,중도,상도) 작업관련 도장상태 검사 등

검사결과 : 적정(특이사항 없음)

○ 현재 행주IC 방향은 하도 및 중도까지 작업된 상태이며, 신월IC 방향은 하도 작업중인 상태임

○ 공사장 배수로 상태 확인결과 양호함(배수로 청소작업 실시)

- 준공전 배수로 불량구간 확인시 즉시 청소예정(수시점검)

터널부 도장상태 검사	옹벽부 도장상태 및 배수로 상태 검사	옹벽구간 도장상태 검사

Ⅳ		향후계획

2023. 6월 : 잔여공종(도장작업 등) 작업 실시

2023. 6월 : 설계변경 및 준공.

따로붙임  예비준공검사조서 1부.  끝.