문서번호	토목부-10809
결재일자	2023. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		박장진	06/15
			이임섭
협조
	주무관		홍현기

실정보고(대모지하차도 사면녹화) 검토 보고

- 양재대로 구조개선사업 -

실정보고(대모지하차도 사면녹화) 검토 보고

2023. 6.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 양재대로 구조개선사업 -

실정보고(대모지하차도 사면녹화) 검토 보고

『양재대로 구조개선사업』대모지하차도 건설공사 중 개포3단지(수서방향) 도로 Set-back 사면절취 구간의 우기로 인한 사면 붕괴위험 방지코자 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 강남구, 구룡터널 사거리 ~ 삼성의료원 교차로(개포4단지)

○ 규    모 : 폭 4차로, 대모지하차도 연장 1,174km

○ 기    간 : '18. 7. ~ '24. 12.

○ 사 업 비 : 1,940억 원

○ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외1개사

○ 감 리 단 : (주)동명기술공단

Ⅱ		추 진 경 위

○ '21.07.20. : 개포3단지(산136-5) 구간 사면부 녹화 시공

○ '23.04.10. : 개포3단지(수서방향) 구간 Set-back 공사 시행

○ '23.05.19. : 개포3단지(수서방향) 도로사면 정비 요청(강남구→도기본)

○ '23.05.25. : 개포3단지(수서방향) 도로사면 현장 점검 시행

Ⅲ		검 토 사 항

○ 실정보고 사유

- 대모지하차도 개포 3,4단지(수서방향)은 대모산과 인접하여 여름철 집중호우시 사면 붕괴가 우려되는 바

- 유관기관(강남구청 도로관리과) 요청에 따른 현장 점검을 시행하고 사면붕괴 우려구간(산72-3)의 사면녹화 시공을 반영코자 함

21년 시행

금회 추가 시행

공 종 명	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
***** **	** **********	**	*	***	***	*********

○ 사면녹화 우려구간 위치도

○ 수량 변경 현황

○ 공사비 증감 현황

구 분	금 액(천원)			비고
	당초	변경	증․감
1. 부대공	-	******	******
절토사면 녹화	-	******	******
직접공사비	-	******	******
제 경 비	-	*****	*****
도 급 액	-	******	******

- 적용단가 : *************************

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기 내용과 같이 대모지하차도 공사중 우기로 인한 사면 붕괴를 방지코자 사면녹화 시공은 타당한 것으로 판단되어 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 책임기술인 검토의견서 1부.  끝.